아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	인천광역시상수도사업본부장(상수도사업본부 시설부장)
(경유)
제목	“성산가압장~마곡간 도수관로 정비공사" 도로점용공사장 교통소통대책 변경 승인 요청 회신

1. 시설부6419 (2017.10.17)호와 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가 협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 지  점

- 강서구보건소 앞 버스중앙차로 버스승강장 구간(개착공사)

- 양화교 서측∼꿈꾸는 도서관 구간(추진공사(1구간))

- 꿈꾸는 도서관∼등촌교차로 구간(개착공사(23∼31구간)

- 등촌교차로∼백석초교앞 구간(개착공사(31∼32 ④ 구간)

나. 교통소통대책 변경 사항

지 점	변 경 전	변 경 후	변경 사유
강서구보건소 앞 버스중앙차로 버스승강장 구간	·기간 : 2017.10.1.∼2017.10.31 ·시간 : 00:00∼06:00 ·점용 : 2개 차로 점유	·기간 : 2017.10.20.∼2017.11.30 ·시간 : 00:00∼06:00 ·점용 : 3개 차로 점유	상차 및 HPile 항타 작업에 공사 폭원 협소로 시공 불가
양화교 서측 ∼꿈꾸는 도서관 구간	·기간 : 2017.8.20.∼2018.2.16	·기간 : 2018.5.1.∼2018.11.30	지하에 매설된 지장물 등으로 불가피하게 지연되어 공사일정 및 순서 변경
꿈꾸는 도서관∼등촌교차로 구간	·기간 : 2017.6.13.∼2017.11.30	·기간 : 2018.3.1.∼2018.11.30
등촌교차로∼백석초교앞 구간	·기간 : 2017.6.1.∼2017.6.21	·기간 : 2017.10.1.∼2017.10.30

다. 교통소통대책 변경 조건

- 단계별 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치 강화

- 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지

- 공사시 통제수 배치 및 공사 완료후 통보

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백바름		교통운영팀장	서인석		교통운영과장	10/18 강진동
협조자
시행	교통운영과-19837	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2466	/전송		/	pblqw6293@seoul.go.kr	/	대시민공개