문서번호	공원녹지정책과-18262
결재일자	2017.10.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원관리팀장	공원녹지정책과장
황서현		이용남	10/18 유영봉
협조

- 경춘선숲길 주민참여 활성화를 위한 관리운영용역 -

공기연장 추진계획 보고

2017. 10.

푸른도시국

공원녹지정책과

- 경춘선숲길 주민참여 활성화를 위한 관리운영용역 -

공기연장 추진계획 보고

경춘선숲길 주민참여 활성화를 위한 관리운영용역을 수행함에 있어 공원관리운영의 효율성 증진을 위한 지역 경춘선숲길 관리운영 단체의 통합과 일원화를 위한 공동운영체 구성을 위해 공기를 연장하고자 보고드림

□ 용역의 목적

❍ 경춘선숲길 전구간 완료시기에 맞춰 2016년도 시민참여형 공원운영체 조직에 이어 기존 운영단체와 연계한 거버넌스 확대 형성을 모색하고 경춘선숲길 중심으로 지속적인 활동의 발판을 마련

□ 용역개요

❍ 계약건명 : 경춘선숲길 주민참여 활성화 관리운영용역(2차년도)

❍ *********************

❍ 계약금액 : 금사천팔백사십육만삼천원정(￦48,463,000)

❍ 계약년월일 : 2017. 05. 26.

❍ 착수년월일 : 2017. 05. 26.

❍ 준공기한 : 2017. 10. 22.

❍ 과업내용

- 지역주민, 학생, 시민전체가 함께하는 거버넌스의 방향제시

- 경춘선숲길 관리운영방안 및 가이드라인 제시

- 시민참여와 관리운영의 선도적 실행

- 영상제작 : 경춘선 2구간을 널리 알리기 위한 영상물

- 지역문화행사 개최 등

□ 변경사항

❍  변경사항 ; 준공기한 연장

구 분	당 초	변 경
용역기간	2017.05.26. ~ 2017.10.22.	2017.05.26. ~ 2017.11.20.

❍  연기사유

- 경춘선숲길 주민참여 활성화 관리운영용역의 목적은 경춘선숲길을 중심으로 인근 주민들의 공원관리 참여를 높이고 지역 조직을 활성화하여 경춘선숲길 운영관리의 거버넌스를 확대 형성하고 지속적인 활동의 원동력과 발판을 마련하는 것으로

- 2016년(1차년도 용역)에 꾸려진 경춘선숲길 운영관리 단체와 노원구에서 자체 조직한 단체 간 공동협의체를 구성함에 협의와 구체적인 방안 마련에 시일이 소요됨에 공기를 연장하여 과업의 수준을 향상시키고자 함

❍  귀책소재 ; 서울특별시

❍  지체상금 부과여부 : 미부과

□ 향후계획

❍ 2017. 10. 18 : 공기연장의뢰(→ 재무과)

❍ 2017. 11. 20 : 용역준공

붙임 : ********* 1부. 끝.