아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역)

1. 붙임 물재생시설과-15107호(2017.10.17)호와 관련입니다.

2. 아래 용역에 대하여 준공기한을 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 차집관로 성능개선 기본 및 실시설계 용역

나. 계약상대자 : (주)이산 외 2개사

다. 준공기한 연기 : ‘17.12.31.(당초 ‘17.10.11)

라. 용 역 비 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1. 준공기한 연기보고서 1부

2. 준공기한 연기의뢰서 1부

3. 합의각서(변경계약). 1부. 끝.

							물재생시설과장
전문관							박만헌			물재생운영팀장					정훈모					물재생시설과장					10/18 이철해
협조자
시행			물재생시설과-15173									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (물재생시설과 - 서소문청사 1동 8층)															/
전화		02-2133-3831						/전송			02-2133-1043					/	parkmjr@seoul.go.kr												/	대시민공개