문서번호	도시철도설비부-12516
결재일자	2017.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	10/18 구자훈
협 조
	건축공사과장			김내환

『지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신설비공사』

승강장 축소 비상출입문 출입통제설비 실정보고 검토

2017. 10.

서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신설비공사

승강장 출입통제설비 실정보고 검토

지하철 9호선연장건설(3단계)구간 정거장 축소계획에따라 승강장   마감부분에 설치되는 출입문통제설비에 대한 책임감리원 실정보고를     검토하고 보고드림

Ⅰ		개 요

▣ 공사개요

❍ 2015년 감사원 처분요구로 9호선3단계구간 정거장 승강장 축소(8량→6량) 계획

- 승강장 마감 부분 출입문에 출입통제설비 설치

❍ 승강장 축소구역 분야별 업무범위

▷ 예산 : 건축분야 반영조치(통신 시공부분 기술협조)

❍ 관련근거 :승강장 마감축소방안 세부시행계획 (도시철도건축부-9326/ ‘16.12.20)

❍ 출입통제설비 수량

정거장 구 분	931	932	933	934	935	936	937	938
정거장 형태	상대식	섬식	섬식	섬식	섬식	섬식	섬식	섬식,상대식
층 수	지하2층	지하2층	지하3층	지하2층	지하2층	지하3층	지하2층	지하2층
승강장출입문(신설)	4	2	2	2	2	2	2	4
특별피난계단 출입통제설비(통신)		시점 1개소	시종점 2개소	-	-	종점 1개소	-	-
승강장출입문 출입통제설비(건축)	4	1	-	2	2	1	2	4

Ⅱ		공사비 현황

▣ 주요공종 현황

공 종 명	규 격	산 출 기 준
S/W Upgrade	승강장 구역	1식/정거장
Cared Reader	RF용	1EA/출입문
EXIT BUTTON		1EA/출입문
ELECTRIC STRIKER		1EA/출입문
통신케이블신설	UTP CAT. 5E 4P	퇴실버튼용 회선
제어용케이블신설	F-CVV-SB 6C 2.5㎟	리더기, 스트라이커용 회선(6Cx2회선)
후강전선관	16㎜,42㎜	통신기계실~승강장간 배관

▣ 공사비 검토

○ 918~920공구

비 목		918공구	919공구	920공구
		(931정거장)	(932정거장)	(933정거장)	(934정거장)
순공사원가	재료비	8,758,903	2,508,476	-	4,856,236
	노무비 (직노)	43,023,991 (39,947,996)	11,091,664 (10,298,667)	-	23,701,127 (22,006,618)
	경 비	4,012,921	1,054,220	-	2,213,090
	계	55,795,815	14,654,360	-	30,770,453
일반관리비		2,566,607	674,100	-	1,415,440
이 윤		5,637,578	1,371,540	-	3,114,107
총 원 가		64,000,000	16,700,000	-	35,300,000

○ 919~923공구

비 목		921공구	922공구	923공구
		(935정거장)	(936정거장)	(937정거장)	(938정거장)
순공사원가	재료비	4,690,296	3,218,810	5,428,224	10,351,001
	노무비 (직노)	23,246,932 (21,584,896)	15,321,567 (14,226,154)	26,463,511 (24,571,506)	54,616,599 (50,711,792)
	경 비	2,164,951	1,436,898	2,471,498	5,033,823
	계	30,102,179	19,977,275	34,363,233	70,001,423
일반관리비		1,384,700	918,954	1,580,708	3,220,065
이 윤		3,013,121	2,003,771	3,456,059	7,178,512
총 원 가		34,500,000	22,900,000	39,400,000	80,400,000

▣ 적용단가 검토

구 분		적 용 방 법
신규비목	증	적용 단가 : 2개이상의 물가정보지 또는 견적가격 단가중 최저가 적용 노무비 : 시중노임단가 적용 ※ 공구별로 협의단가 적용 필요

Ⅲ		조치계획

▣ 승강장 축소(8량 → 6량)에 따른 마감부분 출입문에 출입통제설비 설치

○ 승강장 마감축소방안 세부시행계획에 따라 공구별 사업비 반영 : 도철건축부

○ 승강장 출입문 출입제어장치(화재수신반 연계) 설치 : 도철설비부

따로붙임 :  감리단 검토보고서 1부. 끝