문서번호	시설과-6521
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
김용주	오임석	박진순		10/19 송천헌
협 조
	주무관		代김용주
	전문관		황인공

해양관 외부방사장 등 시설개선공사

준공기한 연기보고

2017.10.

(시  설  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

해양관 외부방사장 등 시설개선공사

준공기한 연기보고

해양관 외부방사장 그늘막 보수공사중 지붕 그늘막 설치공사를 변경 설계중에 있어 설계 보완후 공사를 완료하기 위하여 공사기간을 연장하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 해양관 외부방사장 등 시설개선공사

□ 계약금액 : 806,464천원

□ 공사기간 : 2016. 11. 30. ~ 2017. 10. 19

□ 계 약 자 : ㈜엠티마스타 대표 이화선

□ 공사내용

○ 물범등 임시사육시설 설치

○ 외부방사장 7개소 수조·인조암보수, 방수공사, 그늘막교체

○ 내부사육시설 수조 및 격리실 보수

○ 관리실 환경개선공사(화장실·샤워실 설치 및 환기설비 설치) 등

○ 주요 구조부 균열 보수공사 등

Ⅱ		준공기한 연기 검토

□ 외부방사장 그늘막 설치 검토

○ 시공자로부터 해양관 외부방사장 그늘막이 태풍,폭설에 취약하다는 검토의견 제기

○ 설계자에게 외부방사장 그늘막 안전성 의견 조회결과 태풍,폭설시에는 그늘막을 걷는 등 최소한의 유지관리가 필요하다는 의견이 제출됨

○ 해양관 외부방사장은 면적이 넓어 그늘막은 태풍.폭설시 유지관리가 어려우므로 기존 지붕철골을 보수·보강하여 재사용하고 그늘막 설치 면적을 줄이는 등 설계업체에서 보완 설계중으로 준공기한 연기가 필요함

Ⅲ		준공기한 연기

□ 계약금액 : 변경없음

□ 공사기간 변경

공사명	계약업체	공사기간		비 고
		변경전	변경후
해양관 외부방사장 등 시설개선공사	㈜엠티마스타 대표 이화선	2016.11.30. ~2017.10.19	2016.11.30. ~2017.12.10	52일 연장
해양관 전기시설 개·보수공사	승기이앤씨(주) 대표 김승수	2016.12.15. ~ 2017.10.19	2016.12.15. ~ 2017.11.15	27일 연장
해양관 전기시설 개·보수공사 감리용역	㈜석윤인곡기술사사무소 대표 최종범	2016.12.1. ~ 2017.10.19	2016.12.1. ~ 2017.11.15	27일 연장

□ 준공기한 연기사유

○ 외부방사장 그늘막 설치에 대하여 보완설계중으로 보완설계 및 공사에 공사기간 연장이 필요한 실정임

□ 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책 : 서울대공원)

Ⅳ		보고자 의견

□ 위와 같이 준공기한을 연기하여 해양관 외부방사장 등 시설개선공사에 만전을 기하고자 함