투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경 시행(2차) (2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사-연간단가)

우리과에서 시행중인 『2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』와 관련하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2017. 2. 28 ~ 2017 .12 .29.

다. 계 약 자 : 원우건설 대표 김장우

라. 설계변경금액

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
총 공사비		80,201,300	97,977,000	증)17,775,700
도급비	공급가액	72,910,273	89,070,000	증)16,159,727
	부가가치세	7,291,027	8,907,000	증)1,615,973
	계	80,201,300	97,977,000	증)17,775,700

마. 설계변경사유 : 경찰청 규제심의, 일상유지보수 물량증가 및 도로교통소통사업외 2개사업 신규물량 발생

바. 예산과목

연번	예산과목	금 액(원)	품의번호 (품의일자)	비 고
1	도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물 관리,교통사업특별회계, 교통안전표지 설치 및 유지보수, 시설비	91,465,000	9 (2017.02.09)	낙찰차액:7,928,700-
2	도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 도로교통소통개선사업, 시설비	3,190,000	130 (2017.10.17.)	한남IC
3	도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비	1,620,000	131 (2017.10.17.)	반포대교 남단
4	도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기사업, 시설비	670,000	132 (2017.10.17.)	금천대광 아파트 앞
5	도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사망사고 줄이기사업, 시설비	4,367,000	133 (2017.10.17.)	독산119 백운119

붙임 : 1. 설계변경내역서,         2. 관련도면 1부.        3. 합의각서 1부.

4. 제경비검증확인서 1부.   5. 설계변경 방침서 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김용문		기전과장	임태수		남부도로사업소장	10/19 代송기영
협조자	주무관	김미정		관리단속과장	송기영
시행	기전과-5634	(		)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145	/
전화	02)3284-5432	/전송	02)832-5470	/		/	부분공개(7)