문서번호	수상안전과-5063
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
최윤정		송재우	10/19 최규해
협조
	총무과장		박병현

한강르네상스호

중간검사 및 수리 계획

2017. 10.

한강사업본부

(수상안전과)

한강르네상스호 중간검사 및 수리 계획

한강르네상스호 중간검사의 검사기준일에 따라 검사 및 수리계획을   수립하여 안전에 만전을 기하고자 함

검사대상

○ 한강르네상스호 제원

선명	선체규모(m)	톤수	속도	승선정원	건조일
한강 르네상스호	37 x 9 x 2.5 (길이, 폭, 깊이)	194톤	10노트	77명	2009.07.01

□ 검사개요

○ 근      거 : 선박안전법 제9조(중간검사)

○ 검사기준일 : 2017. 9.18.(전후3개월)

○ 검 사 기 관 : 선박안전기술공단(KST) 서울지부

○ 검 사 장 소 : 여의도 관공선 선착장

○ 검사방법

- 선체검사는 수중검사(KST 승인업체)로 수검

- 기관검사는 주기관 및 발전기 등 시험 및 시운전 후 수검

○ 소요예산 : 총 33,000천원 (선체 : 24,000천원, 기관: 9,000천원)

○ 예산과목 : 한강 관공선 등 운영 및 관리, 공공운영비

□ 검사 및 수리내역

〔선체검사〕

○ 수중검사

○ 선체 1층 갑판 데크 교체 공사

〔기관검사〕

○ 주기관 설비점검, 안전장치 시험 및 시운전

○ 발전기 안전장치 시험 및 시운전

○ 주배전반 등 절연저항 시험 및 수검

○ 오수처리장치 부품 교체

□ 검사 및 수리업체 선정

〔선체검사 … 수중검사〕

○ 추진방법 : 3,000천원 이하 일반지출

- 수중검사는 고도의 전문성과 안정성이 요구되는 사항으로 다년간

경험이 풍부한 KST 승인업체 선정

○ 소요예산 : 금2,000천원(부가세 포함)

〔선체수리 … 갑판교체〕

○ 추진방법 : 수의계약

- 지자체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호

○ 소요예산 : 금22,000천원(부가세포함)

〔절연저항 시험〕

○ 추진방법 : 3,000천원 이하 일반지출

- 절연저항 전문업체 선정

○ 소요예산 : 금1,000천원(부가세 포함)

〔기관검사 … 안전시험〕

○ 추진방법 : 수의계약

- 지자체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호

- 캐터필라 대리점으로써 안전장치 시험 및 시운전 전문 업체 선정

○ 소요예산 : 금5,000천원(부가세포함)

〔기관수리 … 오수처리장치〕

○ 추진방법 : 3,000천원 이하 일반지출

- 오수처리장치 제조 및 수리 전문 업체 선정

○ 소요예산 : 금3,000천원(부가세 포함)

□ 추진일정

○ 시장조사 및 시행공문           : ~ ’17.10.24

○ 산출내역 작성 및 계약체결 의뢰 : ~ ’17.10.27

○ 계약체결 및 검사·시험 준비      : ~ ’17.10.31

○ 수리 및 선체․기관검사 수검    : ~ ’17.11.25

□ 행정사항

○ 총무과 수의계약 체결 의뢰.

○ 선박안전기술공단(KST) 선박검사.  끝.