문서번호	시설관리과-31396
결재일자	2017.10.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김철수		김상웅	10/19 허준행
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과보고

(2017년 평창동등 8개동 상수도공사)-1차

2017. 10.

설계변경 심의자료

가. 공사명 : 2017년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 제  목 : 설계변경심의-1차

다. 일  시 : 2017. 10. 19(목) 오후 15:00

라. 참석자 : *******

*****************************

마. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~400mm	810m
변 경	13~400mm	891m	증) 79m

바. 공사기간 : 2017. 06. 02 ~ 2018. 06. 30

사. 공사금액 :

구 분	설계변경 현황			비고
	당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	458,971,640원	458,971,640원

아. 설계변경 심의내용 : 아래 첨부

설계변경 심의내용

1. 공사 현황

가. 공사명 : 2017년 평창동 등 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 :

구 분	구 경	연 장	비 고 (증,감)
당 초	13~400mm	810m
변 경	13~400mm	891m	증) 79m

다. 공사기간 : 2017. 06. 02 ~ 2018. 06. 30

라. 수 급 인 : ***************

2. 설계변경 사유보고

가. 공사중 물량 증.감 사항 발생

- 물량증가 : 토사절취등 25개 공종

- 물량감소 : 콘크리트 포장절단등 30개 공종

나. 신공종 발생

- 주철관(이형관) 부설공등 24개 공종

3. 설계변경 검토결과

가. 물량이 증.감한 일부공종에 대해 계약율을 적용

나. 도급액 범위내에서 물량변동

다. 신공종에 대해 낙찰율을 적용

라. 심의위원회 의견: 설계변경 적정

붙 임: 1) 설계변경내역서 1부.

2) 심의위원회의견서 1부. 끝.