문서번호	생태공원과-2911
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
방호익		최병언	10/19 문길동
협조

현장여건 변동에 따른 실정보고

-한강 이촌권역 자연성 회복사업-

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

현장여건 변동에 따른 실정보고

- 한강 이촌권역 자연성 회복사업 -

한강 이촌권역 자연성 회복사업과 관련 새남터 순교성지 방문차량(대형버스) 주차구역이 없어 주차민원이 반복적으로 발생하여 이촌5주차장에 대형버스 주차면 확보에 따른 차량동선 및 포장면적 변경 실정보고 사항에 대한 검토임.

※ 관련근거 : 김제리 의원 요구사항, 서울시설공단 공사감독3처-9219(2017.10.19.)

Ⅰ				공사개요

❍ 공 사 명 : 한강 이촌권역 자연성 회복사업

❍ 공사규모 : 자연형 호안 조성 1.1km, 자전거도로 이설 1.3km, 상수관로

부설 1.45km, 주차장 포장 1,582㎡

❍ 공사기간 : '16. 2. 29 ~ '17. 12. 19

❍ 도 급 비 : 5,181백만원(도급비 3,465, 관급비 1,716)

❍ 시 공 사 : 임원개발㈜ 대표 이대성

❍ 감 리 사 : 서울시설공단

❍ 위    치 : 원효대교상류 ∼ 한강대교 하류

Ⅱ				공사감독 현안사항 보고

❍ 차량 진․출입 동선 및 포장면적 변경

- 이촌5주차장 부지에 새남터 순교성지 방문차량(대형버스) 진․출입(회차반경 R12 확보) 및 주차에 따른 차량 진․출입 동선 변경으로 주차장 포장면적 변경이 필요함.

- 포장면적  변경 내역

구 분	공 종	단위	당 초	변 경		증․감
자전거도로	아스팔트 포장	a	90.37	97.45		증) 7.08
주차장	투수블럭 포장	㎡	1,582	1,714		증) 132
	인조화강블럭 포장	㎡	502	493		감) 9
	경계석 설치(180×200)	m	335	395		증) 60
	도로경계석 설치(150×150)	m	234	236		증) 2
	차선도색(실선 및 문자기호)	㎡	594		631	증) 37

- 이촌5주차장 진․출입로 변경에 따른 수목 존치에 따른 주변 마운딩(흙깍기, 흙쌓기)

부분에 대하여는 경미한 사항으로 현장상황에 맞게 시공후 정산시 반영

주차장 포장 도면(당초)	주차장 포장 도면(변경)

【조치의견】

- 주차장 대형버스 진․출입 동선 변경에 따른 포장면적 물량 증가분 반영을 승인코자 함.

∙공사비 증가 12,070천원

Ⅲ				종합 의견

❍ 상기 공사감독 현장 보고내용과 같이 시행하고, 시공시 현장상황 등에 따라 발생하는 경미한 변경사항(토공)은 설계변경시 정산 반영코자 함.

붙임  현장 실정보고서 1부. 끝.