문서번호	방재시설부-17701
결재일자	2017.10.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
임성은		신용우	10/19 남궁용
협조

『도시고속도로 연결램프(정릉길)』

조경공사 실정보고사항검토 보고

2017. 10

도시기반시설본부

[방재시설부]

『도시고속도로 연결램프(정릉길)』

조경공사 실정보고사항검토 보고

『도시고속도로 연결램프(정릉길) 설치공사』 구간내 성북구청 협조사항으로  수목식재장소 및 수종변경 실정보고 사항 검토임.

- 관련근거 : 극감정릉 제17-181(2017.10.17.)호

공사현황

○ 위    치 : 성북구 정릉동 국민대 앞(정릉램프 주변)

○ 규    모 : L = 533m, B = 5m

- 신설램프 120m(교량), 본선확장 82m, 보도BOX 31m,

U-TYPE 37m,토공구간 263m

○ 공사기간 : 2013.12.30 ～ 2016. 12. 29

○ 도급비 : 조경168백만원(전체 10,200백만원)

○ 감리사/시공사 : 극동엔지니어링/풍림산업(주)

책임건설사업기술자 검토의견

○ 검토내용

- 실정보고 사유 : 성북구청 협조요청 사항 반영(도시재생디자인과-10041 17.09.13)

1) 공사구간 내 수목 식재 장소 및 수종 변경.

2) 가설물(컨테이너)의 통행편의 및 안전을 위하여 주민접근 및 이용에 불편이 없도록 부지정비와 인접 주택 대지경계부에 휀스 설치

- 추진경위

○ 2017.05. : 공사구간 내 수목 식재 관련 협의(성북구청 공원녹지과)

(교량하부 구간이므로 현장에 맞는 수목 식재 요청)

○ 2017.08. : 수목 식재 장소 및 수종 관련 협의(방재시설부 조경시설과)

○ 2017.09. : 수목 식재 장소 및 수종 관련 합동조사

(성북구청 공원녹지과, 감리단, 시공사)

○ 물량변경 현황

공 종 명	규 격	단위	당초	변경	증감	비고
8. 조 경 공
1) 토 공
파쇄물처리상차	*******	*	*	*	*
임목폐기물상차	*******	*	**	**	*
2) 시설물철거공
조경석쌓기A헐기	****	*	**	*	**
조경석쌓기B헐기	****	*	**	**	*
파고라.평의자철거		*	*	*	*
3) 시설물설치공
파고라설치	****************	**	*	*	*
평의자설치	**************	**	*	*	*
수목보호홀덮개	***********	**	********	*	**
조경석 쌓기	**	*	**	*	**
식재면 고르기공	********	*	******	********	********
성토면고르기공	*********	*	**	********	********
거적덮기	*****	*	*	****	****
목재흙막이 설치	****	*	*	****	****
횡간경계목 설치	*******	*	*	***	***
메쉬출입문	*************	**	*	*****	*****
메쉬 휀스	*************	**	*	*******	*******
4) 식 재 공
스트로브잣나무	***********	*	********	**	**
은행나무	*********	*	********	**	**
팥배나무	*********	*	********	**	**
사철나무	***********	*	********	***	***
회 양 목	***********	*	********	****	***
산 철 쭉	***********	*	*********	***	*****
화살나무	***********	*	*********	*****	***
맥 문 동	******	*	*********	********	*****
무늬둥글레	*****	*	********	**	***
바 위 취	*****	*	*********	********	*****
비 비 추	******	*	*********	********	*****
왜성술패랭이	*****	*	*********	********	***
줄 사 철	*****	*	*********	********	*****
주목	*********	*	*	**	**
모감주나무	********	*	**	********	********
산벚나무	*******	*	**	********	********
산수유	********	*	**	********	********
배롱나무	********	*	**	********	********
복자기	********	*	**	********	********
자산홍	*********	*	**	********	***
백철쭉	*********	*	*	***	***
옥잠화	************	*	*	********	********
관중	****	*	*	********	********
수호초	******	*	*	********	********
송악	*************	*	*	******	******

○ 적용단가 검토

1) 기 계약공종

- 기 계약 공종의 증․감된 공사량의 단가에 대해서는 공사계약 일반조건 제20조

①에 따라 기 계약단가를 적용하였음

2) 신규단가 검토

- 2015년 상반기 서울시(도시기반시설본부) 조경설계대가 기준에 보고시점의 단가를 산출하여 협의율(94.076%) 적용

○ 공사비 증·감 대비표

단위: 원

공 종 명	당 초	변 경	증 • 감	비 고
8. 조 경 공
1) 토 공	*******	*******	*
2) 시설물철거공	*******	*******	********
3) 시설물설치공	**********	**********	*********
4) 식 재 공	**********	**********	*********
직 접 공 사 비	***********	***********	**********
제 경 비	**********	**********	*********
공 급 가 액	***********	***********	**********
부 가 가 치 세	**********	**********	*********
도 급 액	***********	***********	**********

○  책임건설기술자 의견

• 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사의 수목 식재 장소 및 수종변경은 수목유지관리 부서인 성북구청 공원 녹지과 협의사항을 수용하여 변경 시행함이 타당한것으로 판단됨.

•********************************************

검토결과

○ 도시고속도로 연결램프(정릉길)설치공사 구간내 수목식재 장소 및 수종변경과 주민접근 및 이용에 불편함이 없도록 하여 달라는 관할구인 성북구청 협조요청사항 수용으로 불가피하게 변경사항이 발생된   것으로 책임기술자의 검토의견을 수용하고자 하며, 추후 설계변경에 반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임 : 극감정릉 제17-181(2017.10.17.)호 문서 사본 1부.  끝.