국회의원 요구 자료 제출

시 행	공공재생과-11283	(		)
접 수		(		)
결재일자	2017.10.19.
공개여부	비공개(5)
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,재생정책과장

주무관	공공재생과장	재생정책기획관	도시재생본부장		결재
김방용	홍선기	강맹훈	10/19 진희선
협 조
	특화공간조성팀장			안중욱

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 2010번, 이학재 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :  국회의원 요구자료 1부.  끝.

이학재 의원(국토교통위원회, 바른정당)

□ 요구번호 2010번

1. 이명박 시장 재임시 ~ 현재까지 노들섬 관련 개발계획

- 역대 사업별 사업계획(사업명, 사업목적, 사업비, 운영계획 등), 중단/ 변경 사유

- 노들꿈섬 사업 관련(사업계획, 현황, 운영방향, 예산 등 구체적으로)

□  역대 사업별 사업계획

사 업 명	한강예술섬 사업	노들섬 문화명소화 조성사업
기 간	2005. 1 ~ 2012. 5.	2014. 10. ~ 2018.
재임시장	이명박(‵02.07.01. ~ ‵06.06.30) 오세훈(‵06.07.01. ~ ‵11.08.26) 박원순(‵11.10.27. ~ 현재 )	박원순(‵11.10.27. ~ 현재)
사업목적	오페라극장 등 시설조성	시민참여 문화공간 조성
사 업 비	6,735억	530.6억
운영계획	위탁(재단법인)	위탁(민간)

□  중단/변경사유

〇 사 업 명 : 한강예술섬 사업

〇 중단경위 및 사유

- 2010. 09. : 서울시 재단법인 한강예술섬 설립·운영에 관한 조례 폐지

- 2010. 10. : 시의회 공유재산관리계획 부결(3차례) 및 11년 예산 전액삭감

- 2011. 10. : 중앙 투융자심사의뢰 및 결과(재검토)

- 2012.  5. : 한강예술섬 사업 보류계획

· 사유 : 대규모 공연장 건립필요성·적시성에 대한 근본적 문제제기

시재정상황 악화로 대규모 예산투입 부담/노들섬 생태보존 여론 등

□  노들꿈섬(노들섬 특화공간 조성사업) 사업관련

〇 사업개요

- 위    치 : 용산구 이촌동 302-6, 146일대(노들섬)

- 면    적 : 119,854㎡(상단부 60,818㎡, 하단부 59,036㎡)

- 사업기간 : 2014.10 ~ 2018.11.

- 소요예산 : 530.6억(기본계획 3.2, 공모 7, 설계비 등 21.69, 공사비 472억 , 감리비 등 26.71억)

- 시설계획 : 건축연면적 9,385.17㎡, 조경 33,330㎡, 보행육교 574㎡

- 공연장, 다목적시설, 문화집합소, 노들장터, 조경시설, 보행육교 등

건축물		규모(㎡)	옥외시설	규모(㎡)
공연장		1,984.96	조경 (노들숲, 조경)	33,330
다목적시설		1,033.83
문화집합소 및 노들장터	업무시설	2,761.24
	판매시설	1,329.75	보행육교	574
	제1종근린	193.14
	제2종근린	1,828.31
기타		253.94
소 계		9,385.17	소 계	33,904

작성자	소 속	직 위	성 명
	공공재생과	담당사무관	안 중 욱
	☎ 2133-8704	주 무 관	김 방 용
	작 성 일	2017.10.13

이곳에 본문을 입력하세요