문서번호	역사도심재생과-13770
결재일자	2017.10.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도심정책팀장	역사도심재생과장	재생정책기획관		도시재생본부장
이기명	김용민	양병현	강맹훈		10/19 진희선
협 조

용역 준공기한 연기 검토보고

(3.1운동 100주년기념 시민공간 조성 기본계획 수립)

2017. 10.

도시재생본부

역사도심재생과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

용역 준공기한 연기 검토보고

(3.1운동 100주년기념 시민공간 조성 기본계획 수립)

「삼일대로 일대 3.1운동 기념 대표가로 조성 기본계획 수립 용역」에 대한 준공기한 연기 검토 보고임

1		용 역 개 요

□ 용역내용

○ 용 역 명: 삼일대로 일대 3.1운동 기념 대표가로 조성 기본계획 수립 용역

○ 용역기간: 2016. 10. 26. ~ 2017. 10. 20.

○ 계약금액: 174,500천원

○ 용 역 사: (주)피엠에이엔지니어링

○ 주요 과업내용

- 삼일대로 주변 스토리 아카이빙 구축 및 핵심사업 구상

- 대표가로 조성 기본계획, 의견 수렴 및 공감대 형성 등

□ 그간 추진사항

○ ‘16. 10. 26.       : 용역 착수

○ ‘16. 12. ~ ‘17. 1. : 전문가 자문(2회)

○ ‘17. 3.  ~ ‘17. 6. : 주민대표 33인 모집

○ ‘17. 6. 9.            : 심포지엄 개최(전문가 및 주민대표)

○ ‘17. 7. ~  ‘17. 8.   : 주민워크숍 운영(4회)

○ ‘17. 9. 20.         : 기본계획(안) 최종보고(본부장)

2		준공기한 연기

□ 준공기한 연기

○ 계약기간: 2017. 10. 20. → 2017. 11. 20.(1개월 연장)

○ 연기사유

- 기본계획에 지역주민의 의견을 충분히 반영하기 위하여 주민대표를 모집하여 심포지엄 및 워크숍을 ‘17. 6월부터 개최·운영(총 5회)하면서 용역을 수행하여 왔으나 용역 중간보고 등 내부검토를 통하여 계획(안)이 조정되어 최종 주민설명회 등 절차 이행이 지연됨에 따라 절대공기부족으로 준공기한을 연기하고자 함.

○ 귀책소재: 서울특별시

○ 지체상금 부과 여부: 미부과

3		행 정 사 항

○ 용역 준공기한 연기 의뢰(→ 재무과)

붙임 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.