아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 재계약 의뢰(광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역)

우리과에서 진행중인 『광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역』이 설계변경   됨에 따라 재계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 광화문광장 저수조 및 저류조 청소 용역

나. 계약업체 : 세계산업(대표 구성숙 ☏ 02-2068-1513,*************)

다. 계약기간 : 2017. 3. 27. ~ 2017. 10. 31.

라. 계약금액

○ 당  초 : 금30,776,080원(금삼천칠십칠만육천팔십원)

○ 변경후 : 금27,478,000원(금이천칠백사십칠만팔천원)

○ 감  액 : 금3,298,080원(금삼백이십구만팔천팔십원)

마. 설계변경사유 : 강수, 강풍 의한 분수 가동 정지에 따른 물량 감소

○ 물량감소 수량

- 당초 : 공정별 저류조 청소 횟수 총 94회

- 변경 : 공정별 저류조 청소 횟수 총 76회

○ 예산과목 : 지속가능한 역사문화 도심구현, 역사도심 활성화, 광화문광장 관리운영, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 용역 정산보고서, 설계변경 내역서, 합의각서 각 1부. 끝.

	역사도심재생과장
★주무관	김진기		광장관리팀장	代이민찬		광화문광장기획반장	10/19 박상보
협조자	계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-13809	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 신청사 10층 역사도심재생과 광화문광장기획반	/
전화	02-2133-7735	/전송	02-2133-0742	/	ggjjkk@seoul.go.kr	/	부분공개(6)