아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(삼일대로 일대 3.1운동 기념 대표가로 조성 기본계획 수립 용역)

우리부서에서 시행중인 「삼일대로 일대 3.1운동 기념 대표가로 조성 기본계획 수립 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한를 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명: 삼일대로 일대 3.1운동 기념 대표가로 조성 기본계획 수립 용역

2. 계 약 자: ㈜피엠에이엔지니어링

3. 준공기한 연기: 당 초 2017. 10. 20. → 변 경 2017. 11. 20.

4. 연기사유: 붙임(연기 의뢰서)

5. 귀책소재 : 서울특별시

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	이기명		도심정책팀장	김용민		역사도심재생과장	10/19 양병현
협조자
시행	역사도심재생과-13798	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로110 (태평로1가) 신청사 11층	/
전화	2133-8489	/전송	2133-0742	/	kmyeong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)