투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(문화시설과장)
(경유)
제목	공사변경 사항에 대한 의뢰부서 의견 조회(체부동 생활문화센터 조성공사)

1. 체부동 생활문화센터 조성공사와 관련입니다.

2. 체부동 생활문화센터 조성공사 진행 중 당초 안전진단에 누락된 부분 등이 있어 구조전문가 자문 및 설계자의 검토결과 아래와 같이 공사내용이 변경 되어야 할 사항이 있어 귀 부서의 의견 조회하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

구분	변경 전	변경 후	사 유
첨탑	첨탑부분에 계단 설치	계단을 설치 하지 않고 장선 설치	기 시행됐던 정밀안전진단에 첨탑 부분 안전에 대한 검토가 누락되어 구조자문 결과 설계도서와 같이 계단을 설치하는 것은 불합리하고 장선을 설치하는 것이 바람직한 것으로 판단됨
교회부분 한옥측 외벽(서측)	특별한 보강이 필요하지 않음	철재 각관으로 구조적 보강	한옥부분 2층을 철거한 결과 별체의 전반적인 상태가 양호하지 못 하고 특히 단상으로 사용하던 아치부분 및 음향기기 설치 부분 상부에 균열이 발생
한옥 마당 벽 (꽃담)	특별한 계획없이 벽체 철거	철거 중 발견된 꽃담 보존	한옥 마당 한가운데 꽃담이 있어 미관상 양호하고 한옥건립 당시의 한옥 건립 양식을 알 수 있는 자료로 보전 가치가 있음

붙 임 : 1. 설계자 검토의견서 1부.

2. 교회부분 한옥측 외벽 도면 1부.

3. 구조전문가 의견서(첨탑부분) 1부.

4. 꽃담 보존처리 방안 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박윤수		문화시설과장	최달수		건축부장	10/20 김진용
협조자
시행	건축부-17907	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	부분공개(5)