＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관급자재 조달구매 납품기한 연기 시행(청사증축공사 난방용 전열관)

1. 행정지원과-23929(2017.10.19.)호와 관련입니다.

2. 조달청 계약번호 11168160104호로 계약된 청사증축 냉난방기 및 부속자재 조달구매건에 대하여 납품기한을 아래와 같이 연기코자 합니다.

가. 건    명 : 청사증축 냉난방기 및 부속자재 조달구매

나. 계약금액(품대계) : 금62,966,540원(육천이백구십육만육천오백사십원)

다. 납품기한 변경(연기일수 : 30일)

- 당초 : 2017.10.25.    변경 : 2017.11.24

라. 연기사유 : 선행공정 지연으로 인한 연기

마. 귀책사유 : 강서수도사업소

바. 지체상금부과여부 : 미부과

붙임 : 납품기한 연기 방침서 1부.  끝.

주무관	전기우		행정관리팀장	심정섭		행정지원과장	10/20 김창년
협조자	주무관	김수한
시행	행정지원과-24012	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 행정관리팀	/
전화	02-3146-3820	/전송	02-3146-3879	/	j8228j@seoul.go.kr	/	대시민공개