문서번호	버스정책과-11044
결재일자	2017.10.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정류소관리팀장	버스정책과장	교통기획관
강설영	이희신	김정윤	10/20 이대현
협 조

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사(토목)

설계변경(정산) 보고

2017. 10.

도시교통본부

(버스정책과)

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사(토목)

설계변경(정산) 보고

2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사에 대해 신규 공종 반영 및 현장여건에 따른 시공물량 변경, 보험료를 정산하고 준공금액을 조정하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016년 가로변정류소 이용환경 개선공사

○ 계약금액 : 금1,064,417,150원(계약체결일 : ’16. 12. 9.)

○ 계 약 자 : 주식회사 태영테크 대표 홍성권

○ 계약기간 : 2016. 12. 9.~2017. 9. 15.

○ 공사내용 : 무장애정류소(승강장) 46개소 설치, 승차대 39EA 설치

□ 정산내역

○ 준공금액 조정

구분		공사금액	증·감금액		증·감 사유
총공사비	당초	*************	**	**********	******************
	변경	*************
도급비 (준공금액)	당초	*************	**	***********	***************************
	변경	*************
관급자재비	당초	***********	**	**********	****************************
	변경	**********
이전비	당초	14,410,000	감)	14,410,000	전주, 공중전화 이전 없음
	변경	0

○ 주요 변경내용

********************************************

***********************************************

*********************************

○ 준공금액 조정 상세내역

***************************************

연번	신규 공종명	규격	수량	직접비		신규 발생 사유
				단가	금액
합계					***********
1	********	*****************	****	*********	**********	**********
2	*******	******	**	*	*******	*************
3	***************	*****************	***	*********	*********	****** ****************
4	**** *******		****	*******	**********	***********************************
5	***	********	*******	******	**********	****************************
6	*********		***	*********	*********	****************************
7	***** *****		***	*******	*******	*************** ************
8	*****	***	**	*******	*******	***************************
9	*********		**	**********	**********	***************************
10	****** ******	****	**	*********	*********	************** **************
11	******	********	**	*********	*********	**************************
12	********	***	**	*********	*********	*********************************
13	******** ******		**	*********	*********	*************** ********
14	***********	*****************	***	*******	*********	***********************************************************
15	***********	*********************	**	*******	*********
16	***********	*************	****	******	**********	****************************************************
17	*****	********	*****	******	*********	*************************************

*****************************************

연번	공종명	변경 전	변경 후	증·감액
**		***********	***********	**	***********
1	**************	**********	**********	**	*********
2	**********	******	******	**	*****
3	*******************	***********	***********	**	**********
4	*********************	***********	***********	**	**********
5	****	**********	*********	**	*********
6	*****************	*********	*********	**	*********

********************************************

공종명	금액(원)
	당초	변경	증‧감
**	**********	**********	**	**********
*****	*********	*********	**	***********
*****	*********	*********	**	**********
*********	*******	******	**	********
*******	*********	*********	**	**********
*********	**********	**********	**	**********
*****	*********	*	**	**********
****	**********	**********	**	**********
************	*******	*	**	*******
*************	*******	*	**	*******

***************************

***************************************

*****************************************************************************

․ 시공물량 증·감내역

품명	규격	단위	수량		단가	조달 수수료	변경 구매금액
			당초	변경
**			*****	*****	*******	*******	**********
*****	***************	*	***	**	******	******	*********
*******	*********************	*	***	***	******	******	*********
*******	********************	*	*	***	******	******	*********
*******	********************	*	*	**	******	******	*********
*******	********************	*	*	*	******	*****	*******
*******	*********************	*	*	**	******	*****	*********
*******	*********************	*	*	*	******	***	*******
******	*******************	*	***	***	******	******	*********
******	*******************	*	***	*	*	*	*
******	*********************	*	***	*	*	*	*
****	************	*	**	*	*	*	*
******	*******************	*	**	**	******	******	*********
******	******************	*	**	**	******		*******

○ 이전비 감액 : 금14,410,000원

- 이전(전주, 공중전화)내역 없음

□ 조치계획

***************************************************

********************************************************

**************************************

- 예산과목 : 도시교통본부 버스정책과, 버스운영체계 개선 및 관리, 버스 서비스 향상 및 고급화, 가로변 버스정류소 개선사업, 가로변 버스정류소 개선사업, 시설비(401-01)

붙임 : 1. 준공내역서

2. 합의각서 1부.  끝.