문서번호	통계데이터담당관-11583
결재일자	2017.10.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	데이터인프라팀장	통계데이터담당관
류상언	백영희	10/20 代이상이

『2017년 행정데이터통합 및 열린데이터광장 확장 용역』

추 진 현 황 보 고(월간)

2017. 10.

통계데이터담당관

『2017년 행정데이터통합 및 열린데이터광장 확장용역』

추 진 현 황 보 고(월간)

『2017년 행정데이터통합 및 열린데이터광장 확장』사업의 5개월차 추진현황을 아래와 같이 보고드림

▢ 사 업 명 : 2017년 행정데이터통합 및 열린데이터광장 확장

▢ 추진기간 : 2017.9.15.~2017.10.14.(5개월차/전체 7개월)

▢ 사 업 자 : 윤커뮤니케이션즈 컨소시엄

▢ 추진실적( 전체 계획: 78.18% / 실적: 76.52% )

번호	작업 구분명	사업기간	단계	진척율
				계획	실적
1	**********	2017.5.15. ~ 2017.12.14.	**	***	***
2	****************************		**	***	***
3	*************		**	***	***
4	****************************************		**	***	***
5	************************************		**	***	***

1. 열린데이터광장을 기반으로 서울통계 홈페이지 통합

- IA기반 기획 및 디자인

1) 기존 화면정의서 수정 및 보완 : 9.21. ~ 10.31.

2) 메인 디자인/퍼블리싱 수정 : 10.9. ~ 10.17.
3) 데이터 이용하기 디자인 수정 : 10.13. ~ 10.17.

3) 데이터 이용하기 퍼블리싱 : 10.18. ~ 10.20.

- 홈페이지통합 기능구현  : 8.28 ～11.10.

· 열린데이터광장 내부관리자 PostgreSQL DB포팅 : 테스트 및 오류수정 작업

· 자치구 PostgreSQL DB포팅 : 테스트 및 오류수정 작업

· 열린데이터광장/서울통계홈페이지통합 개발 : 데이터 이용하기, 데이터 시각화 작업

2. 오픈 플랫폼화 확대

- DB 마이그레이션 관련 어플리케이션 개발 지원(쿼리 튜닝) : 8.28.~11.21.

- View, Procedure 내 DB-LINK 제거 (DB-Link를 ETL로 교체) : 10.2.~10.30.

3. 실시간 데이터 연계 개선 및 OpenAPI 이용 통계분석 S/W 도입

- OpenAPI서버소스 수정 및 원천데이터별 수집/적재 개별기능(105개/155개) 구현 :10.16.~10.20.

- 통계 화면 개발 : 10.16. ~ 11.10.

4. 지하철 데이터 서비스의 안정적 운영을 위한 통신 인프라 개선

- 안정화 모니터링 (특이사항 없이 정상동작 확인함) : 10.2. ~ 12.14.

▢ 추진계획

1. 열린데이터광장을 기반으로 서울통계 홈페이지 통합

- IA기반 기획 및 디자인

1) 기존 화면정의서 수정 및 보완 : 9.21. ~ 10.31.

2) 데이터 시각화 디자인 : 10.18. ~ 10.23.

3) 데이터 시각화 퍼블리싱 : 10.25. ~ 10.27.

- 홈페이지통합 기능구현  :8.28 ～11.10.

· 열린데이터광장 내부관리자 PostgreSQL DB포팅 : 테스트 및 오류수정

· 자치구 PostgreSQL DB포팅 : 테스트 및 오류수정

· 열린데이터광장/서울통계홈페이지통합 개발 : 디자인/퍼블리싱이 반영된 레이아웃 구성

2. 오픈 플랫폼화 확대

- DB 마이그레이션 관련 어플리케이션 개발 지원(쿼리 튜닝): 8.28.~11.21.

- View, Procedure 내 DB-LINK 제거 (DB-Link를 ETL로 교체): 10.2.~10.30.

3. 실시간 데이터 연계 개선 및 OpenAPI 이용 통계분석 S/W 도입

- OpenAPI서버소스 수정 및 원천데이터별 수집/적재 개별기능(125개/155개) 구현:10.23.~10.27.

- 사용 제한 모듈 개발 : 10.23. ~ 10.27.

4. 지하철 데이터 서비스의 안정적 운영을 위한 통신 인프라 개선

- 안정화 모니터링 (계속) : 10.2. ~ 12.14.

붙임 1. 월간업무현황보고서(5개월차)

2. 회의록 3부

3. PostgreSQL 도입 영향도 1부. 끝.