문서번호	자전거정책과-11711
결재일자	2017.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자전거시설팀장	자전거정책과장
김수영	代김경진	10/20 김성영

2017 자전거 유지보수 사업 변경 시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

도시교통본부

자전거정책과

2017 자전거 유지보수 사업 변경 시행

2017년 자전거도로 유지보수 사업 전반 공사물량 증감 등에 따른 사업비 증감내용을 검토보고 드림

□ 현  황

○ 자전거도로 유지보수 1단계 사업시행을 위한 공사비 재배정 및 공사시행 협조
(자전거정책과-6416(‘17.6.9)) - 성동도로사업소 자전거전용신호등 설치관련, 북부도로사업소 보도턱낮춤 정비 관련

○ 자전거도로 유지보수 2단계 사업시행을 위한 공사비 재배정 및 공사시행 협조
(자전거정책과-9732(‘17.8.30)) - 강북 자전거 거치대, 송파 사고다발지

○ 자전거 유지보수 3단계 사업시행을 위한 공사비 재배정 및 공사시행 협조
(자전거정책과-10875(‘17.9.26)) - 종로, 은평, 송파 노후 구간정비

□ 사업 변경의 필요성

○ 자전거 유지보수 공사 전반에 대해 공사집행 잔액 발생 및 현장여건 불부합으로 인해 공사 및 예산 변경 필요

□ 예산 감배정 내역

연번	공사 시행기관	당초 (천원)	변경 후 (천원)	증감액 (천원)	사 유
	계			-191,512
1	북부도로사업소 도로보수과	545,890	439,640	-106,250	1단계 보도턱 낮춤 공사비용 중 세종대로 교차로 등 현장여건 변경으로 사업비 감
2	종로구청 도로과	360,000	334,616	-25,384	3단계 노후구간 정비사업 후 잔여 공사비 감
3	강북구청 교통행정과	1.000	672	-328	2단계 자전거거치대 사업집행 후 잔액
4	은평구청 교통행정과	59,550	0	-59,550	3단계 노후구간 정비사업 예산을 배정하였으나 연내 사업추진 불가

□ 예산 수시배정 및 재배정 내역

연번		공사 시행기관	당초 (천원)	변경 후 (천원)	증감액 (천원)	사 유
		계			+287,230
수시배정	1	자전거정책과	231,000	311,000	+80,000	- 자전거유지보수 기본 및 실시설계 변경에 따른 용역비 증액 50,000천원 보관함,샤워실,탈의실 설치 30,000천원
재배정	2	성동도로사업소 -시설보수과	55,480	195,480	+140,000	고산자교의 노후된 포장 정비 - 자전거전용신호등 관련
	3	동대문구 - 교통행정과	-	8,500	+8,500	공기주입기 12대
	4	중랑구 - 교통지도과	41,580	43,610	+2,030	공기주입기 2대, 거치대 20대
	5	도봉구 - 교통행정과	10,000	14,200	+4,200	공기주입기 1대, 거치대 12대
	6	구로구 - 교통행정과	314,311	323,311	+9,000	공기주입기 3대
	7	금천구 - 교통행정과	3,000	6,500	+3,500	공기주입기 2대
	8	영등포구 - 교통행정과	146,010	157,510	+11,500	공기주입기 8대
	9	관악구 - 교통행정과	104,110	125,110	+21,000	공기주입기 6대, 거치대 10대
	10	서초구 - 교통행정과	5,600	13,100	+7,500	공기주입기 15대

□ 시행 방안

○ 기 배정한 금액에 대하여 e-호조에서 예산 감배정후 재배정

○ 공사금액이 소액인 경우, 연간단가 계약을 이용하여 시행, 공사금액이 큰 경우 별도 발주

□ 향후 추진계획

○ ‘17. 10.   각 사업시행부서에 예산 재배정(e-호조)

○ ‘17. 12.   공사 준공.  끝.