문서번호	도로보수과-11117
결재일자	2017.10.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김경욱		김권일	10/20 김용제
협조

2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제5차 작업계획 보고

2017. 10.

강서도로사업소

도로보수과

제5차 작업계획 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 10. 20. ~ 2017. 11. 30.

○ 시 공 사 : ㈜성현이엔씨 대표 유 지 화

○ 도 급 비 : 금325,800,000원

□ 보고내용

○ 응답소 민원접수 사항 및 도로부속물 유지관리대상 보수

○ 보수대상 및 물량

연번	위치	작업내용	규격 및 지시물량	작업조건		비고
				주간	야간
1	신목로, 늘사랑교회 앞 안전지대	시선유도봉 설치	20개	√		민원
2	양평로, 당산역~양평동사거리 구간	무단횡단금지시설 설치(자재비 제외)	5경간	√		민원
3	안양천로, 제니스스포츠클럽 앞	시선유도봉 설치	300개	√
4	오리로, 우신빌라 앞	시선유도봉 설치	20개	√		민원
5	오목로, 목동역~신정역 구간	표지병 설치	282개	√		민원
6	신월로, 신정이펜하우스 앞	중앙분리대용 방호울타리 철거(이설)	47경간	√		규제사항
7	신월로, 신정이펜하우스 앞	충격흡수시설 철거(이설)	2개소	√		규제사항
8	영등포로, 청과시장 교차로~씨티은행	중앙분리대용 방호울타리 설치(이설)	47경간		√	연번6 관련
9	노들로, 당산동6가 92-8	충격흡수시설 설치(이설)	1개소	√		연번7 관련
10	남부순환로, 개봉동 232-16	충격흡수시설 설치(이설)	1개소	√		연번7 관련
11	공항대로, 양동중학교 앞	중앙분리대용 방호울타리 설치(이설)	23경간	√		규제사항
12	공항대로, 양동중학교 앞	중앙분리대용 방호울타리 설치(이설)	23경간		√	연번11 관련
13	노들로, 양화대교 남단	노측용 방호울타리 철거	87경간	√		등급 외 시설 개선
14	개화동로, 개화동로 404-1	노측용 방호울타리 철거	87경간	√		등급 외 시설 개선
15	개화동로, 개화동로 404-1	노측용 방호울타리 설치	116경간	√		등급 외 시설 개선
16	안양천로, 안양천로 916	중앙분리대용 방호울타리 철거	54경간	√		등급 외 시설 개선
17	안양천로, 안양천로 916	중앙분리대용 방호울타리 설치	30경간		√	연번16 관련
18	영중로, 영등포시장교차로~영등포역	중앙분리대용 방호울타리 설치	115경간		√	교통사망사고 줄이기
19	목동동로, 신트리공원 앞	측구 스틸그레이팅 정비	1개소	√		민원
20	버드나루로, 당산중학교 앞	무단횡단금지시설 철거	20경간	√
21	버드나루로, 당산중학교 앞	무단횡단금지시설 설치	20경간	√
22	당산로, 문래역 교차로	자전거 마크 설치	12개소	√		자전거도로 사업
23	영등포로, 시장 교차로~ 청과시장 교차로	무단횡단금지시설 철거	120경간	√		교통사망사고 줄이기
24	영등포로, 시장 교차로~ 청과시장 교차로	무단횡단금지시설 기초제거	240개	√		교통사망사고 줄이기

○ 신규 추가 공종

- 측구 스틸그레이팅 정비

우리 사업소에서 시범시공한 배수성 포장용 측구수로관의 스틸그레이팅 지지부 침하 정비

- 충격흡수시설 이설

경찰청 규제에 따라 신정로에서 철거되는 충격흡수시설 이설

※도로보수과-7254(22017.07.12) 도로교통소통개선 및 중앙버스전용차로 흐름개선 사업 시행계획보고

- 가드레일(단부포함) 설치 및 철거(표준부)

경찰청 규제 및 교통운영과 추진 교통사망사고 줄이기 사업에 따라 철거되는 중앙분리대용 방호울타리 이설

※레일은 재활용하고 철거과정에서 파손되는 지주 및 보강지주는 기존 설치제품과 동일 제품을 사급조달하여 설치

※교통운영과-13687호(2017.07.19.) 교통사망사고 줄이기 사업

□ 조치계획

○ 위 보수대상 시설물을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수(연간단가) 업체에

작업지시하여 보수하고자하며 추후 설계변경 시 정산처리하고자 합니다.

- 건    명 : 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사 제5차 작업지시

- 작업위치 : 신목로, 늘사랑교회 앞 등

- 작업기간 : 2017. 10 . 20. ~ 2017. 11. 30.

- 공종 및 물량 : “별첨 작업지시내역”

- 소요금액 : 약 107,177천원 (실제 시공물량에 따라 추후 정산)

○ 도급비 집행 현황                                                (단위 : 원)

공 사 명	도 급 비 (A)	기 집행 공사비 (B)	금회사용(5차) (C)	비고(잔액) (A)-[(B)+(C)]
2017년 도로 및 교통안전 부속물시설물 유지보수공사 (연간단가)	325,800,000	286,044,000	107,117,000	-67,361,000

○ 계약 도급비를 초과하는 공사비는 관급자재비 활용하여 정산

- 미끄럼방지시설 및 개방형가드레일(현장설치도)에 관한 관급자재비 활용계획을 아래와 같이 변경하여, 남은 예산 약 70백만원을 도급비에 반영

내역	변경내용		변경사유
	변경 전	변경 후
미끄럼방지시설	설치수량 1,000㎡	설치수량 0㎡	설치수요 없음
개방형가드레일	납품방법 현장설치도	납품방법 하차도	현장설치도 제품 조달 미등록1)

1) 당초 가드레일을 현장설치도로 발주하려 하였으나, 조달 재계약기간에 현장설치도 납품 가드레일이 재계약되지 않으면서, 조달 등록제품에서 제외됨. 따라서, 가드레일을 하차도로 발주하고 설치를 연간단가업체에 작업지시하여 설치비에 해당하는 공사비(도급비)를 관급자재비로 정산하고자 함.

첨  부 1. 제5차 작업지시서 및 위치 현황 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.

3. 공문 각 1부.  끝.