＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약의뢰(반원초등학교 외 12개소 아리수음수대 배관설치공사)

우리사업소에서 시행중인 「반원초등학교 외 12개소 아리수음수대 배관설치공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1.공 사 명 : 반원초등학교 외 12개소 아리수음수대 배관설치공사

2.도 급 자 : ㈜조은에너지 대표 신용길

3.계약기간 : 2017. 5. 30. ~ 10. 26.

4.공사개요

- 당초 :음수대 배관설치 D=15~50mm, L=1,328m

- 변경 :음수대 배관설치 D=15~50mm, L=1,770m

5.설계변경 사유 : 추가공사 시행에 따른 물량 증가 및 신규공종 발생

6.설계변경 금액

구 분		당초 금액	변경 금액	증 ․ 감
도 급 액		68,527,930	119,900,000	증51,372,070
	공급가액	62,298,119	109,000,000	증46,701,881
	부가가치세	6,229,811	10,900,000	증4,670,189

7. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비), 음수대설치

붙  임 : 설계변경 관련 서류 1부.   끝.

	시설관리과장
주무관	김일구		시설관리과장	10/20 박은선
협조자
시행	시설관리과-23266	(		)	접수		(		)
우		강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/		/	대시민공개