문서번호	토목부-21682
결재일자	2017.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	10/20 김영수

선사로~고덕지구간 도로확장공사외 1개소 전면책임감리용역 설계변경 검토보고(전체14회 및 9차2회)

2017.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 선사로~고덕지구간 도로확장공사외 1개소 전면책임감리용역 -

설계변경 검토보고(전체14회 및 9차2회)

감리용역 시행중 감리원 배치 조정에 따른 설계변경 사항이 발생되어 검토 보고드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 선사로~고덕지구간 도로확장공사 외 1개소 통합전면책임감리용역

○ 도 급 자 : ㈜한국건설관리공사, ㈜경화엔지니어링

○ 용역현황

(단위:천원)

구 분	도 급 비	계약년원일	착공년월일	준공기한	비고
전 체	4,922,600,000원	'09.03.13	'09.03.16	'17.11.30
9차	500,000,000원	'16.12.30	'17.01.02	'17.10.31

□ 설계변경 및 준공기한

○ 설계변경 사유

- 전체14회 : 예산절감위해 정산 후 계약금액 조정

- 9차  2회 : 감리원 투입 기간에따른 내역 및 계약금액 조정

○ 설계변경 내역

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
전제 14회	4,943,150	4,919,800	23,350 감	계약금액 조정
9차 2회	500,000	546,800	46,800 증	“

○ 준공기한

구 분	당 초	변 경	증 · 감
전체	'09. 3.16. ~ '17.11.30.	'09. 3.16. ~ '17.11.20.	감 10일
9차1회	'17. 1. 2. ~ '17.10.31.	'17. 1. 2. ~ '17.11.20.	증 20일

○ 설계변경 세부내역

- 전체 14회

구 분	단위	전 체 14 회			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
감 리 사(총괄)	개월	104.50	104.16	감 0.34
감 리 사 보(토목)	“	103.30	102.96	감 0.34
감 리 사 보(토목)	“	68.90	68.56	감 0.34
감 리 사 보(안전)	“	22.27	22.35	증 0.08
감 리 사 보(전기)	“	20.50	20.00	감 0.50
감 리 사 보(조경)	“	10.17	10.17	-
감 리 사 보(기계)	“	7.52	7.50	-
비상주(도로,토질 등)	식	1.0	1.0	-

- 차수 9차2회

구 분	단위	9차2회			비 고
		당 초	변 경	증 · 감
감 리 사(총괄)	개월	10.00	10.66	증 0.66
감 리 사 보(토목)	“	10.00	10.66	증 0.66
감 리 사 보(토목)	“	10.00	10.66	증 0.66
감 리 사 보(안전)	“	0.0	0.0	-
감 리 사 보(전기)	“	2.00	2.50	증 0.50
감 리 사 보(조경)	“	1.70	2.97	증 1.27
감 리 사 보(기계)	“	0.0	0.0	-
비상주(도로,토질 등)	식	1.0	1.0	-

□ 조치 계획

○ 감리용역 시행중 총차 및 차수 계약금액내에서 감리원 투입기간을 조정하여 설계변경을 시행하여 준공 정산처리하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 의뢰서 1부.

2. 설계변경 내역서 각 1부.  끝.