문서번호	토목부-21670
결재일자	2017.10.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		박용택	10/20 김영수
협조
	주무관		김동현

설계변경(전체1회, 2차 1회) 검토보고

【중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업 관리용역】

2017. 10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계변경(전체1회, 2차 1회) 검토보고

【중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업 관리용역】

『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업관리용역』시행 중

강교제작일정 변경과 공사관리를 위한 토목, 강교 분야별기술자의 근무기간조정을 반영한 설계변경 검토 보고임.

※관련근거 : 대한(감본) 제17-330호(2017.10.20)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사 건설사업관리용역

○ 용역규모 : 닐센아치교(B=4.5m,L=191m)

○ 용 역 비 : 761백만원(2차 : 300백만원)

○ 용역기간 : ‘16.05.16.～’18.06.15.(2차 : ‘17.01.16∼’17.10.24)

○ 용 역 사 : ㈜대한콘설탄트 외 1개사

2		설계변경 검토

○ 변경내역(전체 및 2차분)

구 분		당 초	변 경	비 고
전체 (1회)	금액	761,190,000	761,190,000	금액변경 없음
	기간	2016.05.16 ~ 2018.06.15. (761일)	2016.05.16 ~ 2018.06.15. (761일)	기간변동 없음
2차 (1회)	금액	300,000,000	300,000,000	금액변경 없음
	기간	2017.01.16 ~ 2017.10.24. (282일)	2017.01.16 ~ 2017.10.24. (282일)	기간변동 없음

○ 전체분(1회) 변경 내용

- 계약금액 : 761,190천원 → 761,190천원(변경없음)

- 용역기간 : 2016.05.16 ∼ 2018.06.15(변경없음)

- 변경사유

․ 상주 건설사업관리기술자 투입일자 조정

당초

변경

구 분	등 급	담당업무	투입기간(착수후,월)			비 고
			10	20	25
책임기술자	특급	사업총괄				변경없음 (25개월)
분야별기술자	중급	토 목				20개월 ⇒ 24.6개월
분야별기술자	중급	강교(제작)				8개월 ⇒ 6개월
분야벽기술자	중급	전 기				변경없음 (2개월)

- 건설사업관리기술자 배치 투입현황

구 분	당 초	변 경	비고(증감)
책임기술자(1인)	25.0개월	25.0개월	-
토목기술자(1인)	20.0개월	24.68개월	증) 4.68개월
강교기술자(1인)	8.0개월	6.0개월	감) 2.00개월
전기기술자(1인)	2.0개월	2.0개월	-

○ 2차분(1회) 변경내용

- 계약금액 : 300,000천원 → 300,000천원 (변경없음)

- 용역기간 : 2017.01.16. ~ 2017.10.24.(변경없음)

- 변경사유

당초

변경

공 장 제 작

02/01

현장조립,거치

05/31

10/16

12/14

11/01

12/31

구 분	수 량 (ton)	제작 및 거치 일정(2017년)				비 고
		1∼3월	4∼6월	7∼9월	10∼12월
강교제작 및 거치	440.617				05/31
					10/24	2차공사 기간

· 강교제작 및 거치일정 변경으로 강교관리기술자 배치 조정투입

· 임시공휴일 적용(2017.10.02.)

- 감리원 배치 투입현황

구 분	당 초	변 경	비고(증감)
책임기술자(1인)	9.04개월	9.00개월	감) 0.04개월
토목기술자(1인)	9.04개월	8.68개월	감) 0.36개월
강교기술자(1인)	4.00개월	4.32월	증) 0.32개월
전기기술자(1인)	-	-	-

3		조치의견

○ 상기 보고내용과 같이 기술자 투입 변경에 따른 전체(1회) 및 2차(1회) 계약분에 대한 설계변경을 반영하여 감리업무 추진에 만전을 기하고자 합니다.

붙  임 : 1. 설계변경 건설사업관리기술자 검토보고서 각 1부.

2. 설계변경 내역서(전체 1회)  1부.

3. 설계변경 내역서(2차  1회)  1부.  끝.