문서번호	공간정보담당관-11813
결재일자	2017.10.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
최지혜		서미연	10/23 박문재
협조

2017년 항공사진 DB구축 사업 주간업무(10월3주) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-3194				57,200천원

2017. 10.

공간정보담당관

2017년 항공사진 DB구축 용역 사업

주간업무(10월3주) 보고

사업명			2017년 항공사진 DB구축 용역
사업기간			‘17.7.24.~‘17.12.31.	담 당		공간정보담당관 최지혜
사업비			57,200천원	업체/PM		㈜씨엠월드 컨소시엄 박성원 차장
보고기간			‘17.10.16.~‘17.10.20.	전체공정율		계획 20.1% / 실시 14.8%
주요내용			1. 사진 주기 이상 파일 확인 및 전달 - 44매 재 취합 2. 기무사 보안 작업
주간 업무 보고
Part	금 주 실 적 (2017.10.16 ~ 2017.10.20)				차 주 계 획 (2017.10.23 ~ 2017.10.27)
사업관리	1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - DB구축 진행 상황 체크				1. 사업관리 - 주간업무 보고 작성 - DB구축 진행 상황 체크
DB구축	1. 자료분석 및 확인 - 사진 주기 확인 - 파일 이상 유무(포맷 및 파일 에러등) 2. 사진 주기 이상 파일 취합 - 취합일 : 2017.10.16.(월) - 파일매수 : 44매 - 1차 취합 최종 파일 매수 : 735매 3. 기무사 보안 작업 - 보안매수 : 231/735 (약31.4%) - 진행현황 : 65매 처리(약 28.1% 처리 완료) 4. 사진 주기 이상 파일 확인(방위표시 오류) - 41, 43코스 확인 및 오류 사항 전달				1. 기무사 보안 작업 2. 사진 주기 확인 및 보안처리 마크 오류 확인
산출물/ 별첨자료	○ 주간보고서 1부.
협조사항
對 서울시
對 용역업체
기타