문서번호	주거환경개선과-11973
결재일자	2017.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주거환경정책팀장	주거환경개선과장
배재식		곽석권	10/24 유철호
협조

부암권 성곽마을

백석동길 담장개선사업 예산 재배정 계획

2017.  10.

주거환경개선과

부암권 성곽마을

백석동길 담장개선사업 예산 재배정 계획

부암권 성곽마을 재생사업 관련 백석동길 담장개선사업 등에 대한 예산을    자치구에 재배정하여 추진하고자 함.

******************************************************************

*********************

1		사 업 개 요

□ 사업개요

○ 사업내용

구 분	사 업 명	사업 내용	요청액 (천원)
부암권	백석동길 진입부 보행환경 개선	□ 보행환경 개선 □ 화단 및 계단철거 등 보행공간 확보	******
	백석동길 담장개선	□ 도로 및 가로환경개선 □ 하수관로 정비	*******

○ 소요예산 : *************

○ 사업기간 : ‘17.10. ～ 12.

□ 주요 추진사항

○ `17.04.26 : 창의문로3길 골목길 개선사업 예산 재배정

****************

○ `17.05.19 : 백석동길 담장개선 사업 예산 재배정***********

○ `17.10.20 : 예산 재배정 요청

2		사 업 내 용

□ 백석동길 진입부 보행환경 개선

○ 사업대상 :***************

○ 사업내용

- 보행로  개선 : 폭 2~3m, 연장 50m

- 차량방호시설 : 연장 50m

○ 소요예산 : ********

〈위치도〉	〈정비전>	<정비후>

□ 백석동길 담장개선 사업

○ 사업대상 :*******************

○ 사업내용

- 하수관로 정비 : 500 × 600mm, 연장 430m

- 보행친화공간 조성 : 도로포장 2,000㎡

○ 소요예산 : *********

〈위치도〉	〈현황>

3		예산 재배정계획

○ 사업개요

구 분	사 업 명	사업 내용	요청액 (천원)	재배정액 (천원)
부암권	백석동길 진입부 보행환경 개선	□ 보행환경 개선 □ 화단 및 계단철거 등 보행공간 확보	*******	*******
	백석동길 담장개선	□ 도로 및 가로환경개선 □ 하수관로 정비

○ **********************************************************************************************

○ 재배정처 : ***************

○ 주요 교부조건

- 구청장은 각 권역별 성곽마을 재생계획의 부문별 정비계획의 기본방향 등을 고려하여 설계 및 공사가 될 수 있도록 하여야 함

- 구청장은 사업계획 변경시에는 사전에 시장의 승인을 받도록 함

- 구청장은 예산 재배정 목적에 위배됨이 없이 집행하여야 함

- 재배정 예산이 불용되지 않도록 집행 철저, 사업완료시 정산보고 하여야 함

○ 예산과목 : 도시재생본부 주거환경개선과, 평생 살고 싶은 마을만들기 추진,

주거지 재생사업 추진(도정), 성곽마을 보전·관리사업(도정),시설비(당해예산)

3		향 후 계 획

○ `17.11.     :  공사발주

붙임  1. 시비 재배정 결정서 1부.

2. 예산요청 공문 1부.  끝.