투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도시빛정책과장)
(경유)
제목	덕수궁 돌담길 경관조명 개선사업 관련 협의

1. 도시빛정책과-13170(`17.10.23)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는 「덕수궁 돌담길 경관조명 개선공사」와 관련 현장 여건을 반영하여 아래와 같이 변경 시공하고자 하오니, 별도 의견 있을 시 `17.10.27(금)까지 의견 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 변경사항

내용	당초설계	변경시공안	사유
등기구설치	경관조명기구 지중매입 (담장 이격거리 40cm)	기존 경계석에 부착 시공(담장 이격거리 20~30cm)	시범설치 결과 지장물 발견되어 지중매입이 불가하며, 조명등기구 보호 및 침하방지를 위해 화강석에 부착하여 시공
분전반설치	지중분전반 4면 1개소에 집중 설치	지중분전반 4면 3개소에 분산 설치	·원활한 유지관리를 위한 중구청(도로조명팀) 요구사항 반영(붙임2 참조) ·케이블 규격을 낮춰 시공 비용 절감

붙임 : 1)시범설치 사진대지 1부.

2)중구청 관련공문 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정찬교		녹색성장과장	오삼록		설비부장	10/24 권오식
협조자
시행	설비부-17834	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/	jamjaco@seoul.go.kr	/	부분공개(5)