문서번호	교량안전과-19113
결재일자	2017.10.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
임승민	정준용	10/24 한유석

한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교) 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

교량안전과

【특수교량팀】

한강상 PSC교량 안전강화공사〔올림픽대교〕실정보고 검토

한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교) 포장공사 시행중 보차도경계석

재설치가 요구되는 건에 대하여 책임건설사업관리기술자의 현장 실정보고 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 한강상 PSC교량 안전강화공사(올림픽대교)

공사기간 : 2017. 6. 02 ~ 2017. 11. 28

공사개요 : 아스팔트 포장 155.7a, 교면방수 12,695㎡

콘크리트 보수 351㎡, 신축이음 보수 77.5m 등

공 사 비 : 1,787,176천원

(도급비 1,408,576천원, 관급비 294,110천원, 이전비 84,490천원)

시 공 사 : ㈜송화건설 손 성 철

감 리 사 : ㈜동성엔지니어링 외 2

Ⅱ		보 고 내 용

가. 보차도경계석 철거 및 보차도경계콘크리트 타설

○ 오랜 공용기간(1990년 준공)에 따른 보차도경계석 노후 및 기초콘크

리트 열화가 심각하며, 누수로 인한 슬래브 하부 열화, 박리 및 박락 발생

○ 보차도경계석 교체공사가 시급하고 포장공사 전 선이행되어야 할 사항

으로 본공사 포장공사 구간에 저촉되는 보차도경계석에 대하여 금회   우선 정비토록 하고자 하며, 추후 연차적으로 본교 전체구간에 대하여   정비 필요

⇒ 보차도경계석 정비 대상 구간 : 총 L = 800m

- 사장교(상·하류교) 구간 : L=300m × 2개소(상·하류) = 600m

- 본교 북측(하류 P5 ~ P9) 구간 : L=200m

< 위치도 및 보수물량 >

< 현 황 사 진 >

경계석 노후, 기초 열화	경계석 기초 열화	슬래브 하면 열화, 박리 및 박락 발생

나. 공사비 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	소요 공사비		증,감	비고
	당 초	변 경
총공사비	3,700	189,833	(증) 186,133
도 급 비	3,700	184,790	(증) 181,090
관 급 비	-	-	-
이 전 비		5,043	(증) 5,043	폐기물

Ⅲ		조 치 계 획

○ 건설사업감리단 보고내용과 같이 보차도경계석 노후, 기초부 열화 및 누수로     인한 슬래브 하면 열화, 박리 및 박락 발생 등 시설물 정비가 시급한 사항으로

○ 상기 보차도경계석 정비에 소요되는 공사비는 기 보고된 포장 추가     정비대상 구간(교량안전과-17218,2017.9.20)을 감조정(22a⇒9a)하고     사업비내 집행잔액을 활용하여 시행코자 합니다.

- 보차도경계석 정비 소요 공사비 : 186,133천원

붙임  건설사업감리단 실정보고 관련공문 1부. 끝.