투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	영동3교 보수공사 설계변경 시행(준공정산)

영동3교 보수공사의 준공에 따른 정산 설계변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 영동3교 보수공사

나. 공사기간 : 2017.6.7 ~ 10.30

다. 도 급 자 : 천담개발(주)  대표  이명부

라. 설계변경내역

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
합 계		1,040,000,000	1,040,000,000	0
도급비	공급가액	858,990,000	858,405,037	감 584,963
	부가가치세	85,899,000	85,840,503	감 58,497
	계	944,889,000	944,245,540	감 643,460
관 급 비		77,172,000	77,815,460	증 643,460
폐 기 물		17,939,000	17,939,000	0

마. 예산과목

○ 안전총괄본부 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리,

영동3교 보수공사, 시설비 및 부대비(시설비)

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		시설보수과장	박국남		동부도로사업소장	10/24 代김현수
협조자
시행	시설보수과-7880	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	부분공개(7)