문서번호	도로관리과-17270
결재일자	2017.10.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
엄태용		오석관	10/24 배광환
협조
	주무관		최현

동공탐사용역 공정회의(8월) 결과

2017. 10.

안전총괄본부

도로관리과

동공탐사용역 공정회의(8월) 결과

□ 회의개요

○ 일    시 : ’17. 9.11.(월) 16:00 ~ 17:30

○ 장    소 : 도로관리과 회의실

○ 안    건 : 월간 공정회의(2017-1단계, 2017-2단계)

○ 참    석 : 도로관리과장, 도로관리팀장, 업무담당 3명

(업체) 셀파이엔씨(17-1), 지케이엔지니어링(7-2)

□ 추진실적

○ 탐사실적(’17.8.31 기준)

구분	1차로 기준 연장(㎞)				동공(개소)					적중률 (미달포함)
	계획	탐사	분석	천공	분석	제척 (GPR)	천공	발견 동공	규격 미달
계	1,420	1,032	946	891	741	120	587	479	45	89.3%
17-1단계	880	880	880	860	707	119	572	465	45	89.2%
17-2단계	540	152㎞	66	31	34	1	15	14	0	93.3%

※ 적중률 = (발견동공수 + 규격미달 동공수) / 천공수

□ 공정회의 주요내용

○ 추진실적(17-1단계, 17-2단계)

- 17-1단계 : 천공하여 동공여부를 확인한 860km 구간에서 동공 465개 발견(km당 0.54개)하여 목표달성 기준(km당 0.6개)에 미달함

- 17-2단계 : 시험탐사구간 66km 중 천공하여 동공여부를 확인한  31km 구간에 대하여 동공 14개 발견(km당 0.45개)하여 목표달성 기준(km당 0.57개)에 미달함

○ 공통사항

- 노면하부 동공탐사 용역에 필요한 공기를 산정하여 보고할 것

- 추가과업은 내실을 기하여 시행

- 월간보고시 각 자치구별 탐사연장 대비 동공개소를 파악하여 작성

○ 17-1단계

- 동공탐사 노면 영상에 횡단 및 평면 스케일 바 삽입

- 안전사고가 발생하지 않도록 만전을 기할 것

○ 17-2단계

- 17-1 단계 추가과업에서 시행하는 흙의 유실속도 실험 참관할 것

- 연내 동공탐사가 마무리 되도록 공정관리 철저

붙임 : 보고자료 2건(출력물).  끝.