투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계용역 준공기한 연장(3차)에 따른 변경계약 요청

1. 녹지관리과–4982호(2017.10.23.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인 ｢광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역｣과 관련하여, 아래와 같이 준공기한 연장(3차)코자 하오니 변경계약 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용 역 명 : 광나루한강공원 힐링숲 체험공원 조성공사 실시설계용역

- 용역기간 : 2017. 3. 21 ~ 10. 24

- 용 역 비 : ********

- 용 역 사 : ****************

나. 준공기한 연장 : 48일 연장

구 분	용 역 기 간	용역비	비고
당 초	2017. 3. 21 ~ 5. 29	변동없음
1차 변경	2017. 3. 21 ~ 8. 25
2차 변경	2017. 3. 21 ~ 10. 24
3차 변경	2017. 3. 21 ~ 12. 11

다. 귀책소재 및 지체상금 부과 여부

- 귀책소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과.

붙임 1. 준공기한 연장(3차) 검토보고서(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서(3차).  끝.

	녹지관리과장
주무관	방일길		녹지관리과장	10/24 문경재
협조자
시행	녹지관리과-4990	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)