투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	난지성인야구장 그라운드 보수․정비작업(공사기간 연기요청)

우리과 난지성인야구장 그라운드 보수․정비작업 공사계약과 관련하여  공사기간 연기를 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다

○ 계약 내역

- 제    목 : 난지성인야구장 그라운드 보수․정비 작업

- 계약번호 : 201701213155

- 계 약 일 : 2017. 9. 25

- 공 사 명 : 난지성인야구장 그라운드 보수․정비

- 준 공 일 : 2017. 10. 26

- 계 약 자 : 한원

○ 요청 내역(공사기간 연기)

- 요청기한 : 2017. 11. 10.(금)

- 연기사유 : 우천 및 연휴로인한 지연.  끝.

	운영총괄과장
주무관	황인견		운영총괄과장	10/25 이원군
협조자
시행	운영총괄과-8358	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)