＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	「뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 폐기물 처리용역」 설계변경 계약 의뢰

우리 본부에서 시행중인 『뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계 변경 계약 의뢰합니다.

1. 용 역 명 : 뚝도정수센터 친환경 녹색정수장 조성사업 폐기물 처리용역

2. 위    치 : 뚝도정수센터내 수도박물관

3. 용역개요

○ 용역기간 : 2017. 07. 10. ~ 2017. 10. 26.

○ 도급금액 : 19,942천원

○ 계 약 자 : 세창환경건설(주) 대표 최기식

○ 용역내용 : 건설폐기물 308.44㎥ 운반 및 701.86ton 처리

4.. 사업비(변경)

구분		당초	변경	증감	비고
총용역비		19,942,000	24,659,000	4,717,000
도급비	공급가액	18,129,091	22,417,273	4,288,182
	부가가치세	1,812,909	2,241,727	428,818
	소계	19,942,000	24,659,000	4,717,000

5. 설계변경 사유 : 주 공사인 친환경 녹색정수장 조성공사(뚝도정수센터) 폐기물 증감에

따른 폐기물 처리 설계변경 시행코자 함

6. 예산과목 : 최고품질의아리수생산, 생산시설 현대화 및 고도화, 뚝도정수센터 시설

현대화 및 고도정수처리시설공사, 시설비및부대비(시설비)

붙 임 : 설계변경 시행문 1부. 끝.

	생산관리과장
주무관	채해바래		생산관리과장	10/25 代유동수
협조자
시행	생산관리과-13948	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-2181-1174	/전송	02-2181-1179	/	bala@seoul.go.kr	/	대시민공개