＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	강동수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(대명초등학교 외 11개소 아리수 직결음수대 배관설치공사)

우리 사업소에서 시행하는 「대명초등학교 외 11개소 아리수 직결음수대 배관설치공사」에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 공사명: 대명초등학교 외 11개소 아리수 직결음수대 배관설치공사

나. 도급자: ㈜미광테크 대표 손진식

다. 공사기간: 2017. 6. 15.~2017. 10. 27.

라. 공사개요: 당초) 음수대배관 D=15~30mm L=930m

변경) 음수대배관 D=15~30mm L=496m (감)434m

마. 변경사유: 신규공종 및 계약물량 증·감사항 발생

바. 변경내용                                             (단위: 원)

구분	당초금액	변경금액	비고
도급비	41,160,660	39,603,730	감)1,556,930

사. 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비(음수대설치사업)

붙임:  1. 설계변경 시행문 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	백창진		시설관리과장	10/25 김태형
협조자	주무관	김정은
시행	시설관리과-20165	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(7)