문서번호	시설관리과-23760
결재일자	2017.10.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
강희창		10/26 박은선
협조

현장실정 보고에 따른 검토결과 보고 (이수고가차도~사평지하차도)

2017. 10. 26.

강남수도사업소

현장실정 보고에 따른 검토보고

『이수고가차도~사평지하차도간 배수관정비공사』와 관련하여 감독업무를 수행하는 서울특별시시설관리공단으로부터 현장실정 보고서가 (가시설 설치, 코너벽돌)접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

(공사감독2처 –12361(2017.10.26.)

1		공사현황

가. 공 사 명 : 이수고가차도~사평지하차도간 배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 06. 08. ~ 2017. 12. 04.

*************************

라. 공사개요 : D=600~1,200mm,  L=682m

****************************, 명성건설(주)최규선

*************************************

사. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

2		공단 보고내용

가. 현 황

- 공사시점부(하나은행 반포동지점 건너편 공원)

· 서초소방서 인근 공사 시점부(D700, D900)에서 기존관과 신설관을

라인스토핑 가설배관으로 연결하고, 교통혼잡을 최소화 하고자 당일굴착

당일복구 하도록 설계되어 있음

· 기존 D700 관로는 보도구간에 있으며 D900 관로는 3차로 및 공원

도로에 있음

· 라인스토핑 가설배관 작업순서(당초)

→ 2개 관로의 터파기→도장제거→피팅용접→샌드위치밸브→부단수천공→

부단수차단 →기존관절단→강관용접배관→기존관 맹판 용접→차단기

제거→샌드위치밸브 제거→되메우기 및 포장

· 위치도

라인스토핑

(D900)

라인스토핑

(D700), 보도

가설구조물

(코너벽돌)

나. 문제점

- 보도구간 라인스토핑(D700) 및 차도구간 라인스토핑(D900)시 3차로 교통

제가 예상되는 실정이며,

- 라인스토핑 가설배관은 기존 두 개의 관로를 부단수차단하여 배관하는 공법         으로 최소 30시간 이상의 작업시간이 예상되며 작업시간 지연에 따른 교통         혼잡 및 근로자 작업피로에 따른 안전사고가 예상되는 실정임

3		실정보고에 따른 사업소 검토의견

- 공사 시점부 라인스토핑(D=900/900mm, D=700/700mm)을 위한 위치에 가         시설(코너벽돌 및 조적쌓기를 이용한 가시설)을 설치하여 1일 작업시간을 최         소화 하여 당일굴착 당일복구 하는 것이 타당하다 사료됨

- 라인스토핑 가설배관 작업순서(변경)

․1일차 가설구조물(사각밸브실) 설치

․2일차 도장제거→피팅용접→샌드위치밸브→부단수천공→철개닫기

․3일차 부단수차단→기존관절단→강관용접배관→기존관 맹판 용접→

차단기제거→샌드위치밸브 제거→되메우기 및 포장

4		조치계획

- 위 검토의견과 같이 가시설(코너벽돌 및 조적쌓기를 이용한 가시설)을 설치         하여 변경시공토록 우선조치 하고,

- 설계변경 사항에 대하여는 시공회사로 하여금 추후 설계에 반영토록 시설공         단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 현장실정보고서 1부.  끝.