아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(도시재생융복합센터)

우리부서에서 시행중인 ‘도시재생 융복합 지원센터 건립 타당성 조사’용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 도시재생융복합지원센터건립 타당성 조사용역

나. 계 약 자 : **************************

다. 준공기한 연기

- 당 초 : 2016.12.28.~ 2017.10.25.

- 변 경 : 2016.12.28.~ 2017.12.25.

라. 연기사유

- 도시재생 융복합지원센터건립 타당성조사 용역에 대하여 현재 3.1운동 100주년 기념관 건립사업으로 변경하여 타당성조사 검증의뢰 하였으나, 보완사항이 제출되었음으로, 보완완료 후 검증완료시 까지 용역기간을 연기하고자 함.

마. 귀책소재 : 서울특별시

붙임  1. 준공기한 연기 보고(방침서) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	이현철		도심정책팀장	김용민		역사도심재생과장	10/26 양병현
협조자	★계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-14136	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 역사도심재생과	/
전화	2133-8511	/전송	2133-0742	/	hyen1234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)