아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(익선지단)

우리부서에서 시행중인 ‘익선지구단위계획 수립’ 용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 익선 지구단위계획 수립용역

나. 계 약 자 : *************

다. 준공기한 연기

- 당 초 : 2017.10.31

- 변 경 : 2017.12.29

라. 연기사유 : 세부내역은 “붙임 준공기한 연기의뢰서 참조”

- 현재 수립중인 지구단위계획의 건축규모(안)에 반대하는 민원과 관련한 서울시 내부의견 조정과 계획검토로 인해 과업기간이 5개월간 지체 되었으며, 주민의 의견과 상위계획 등을 종합적으로 고려하는 서울시의 정책적 결정을 위해서는 추가 과업기간이 필요하며,

- 지구단위계획 수립을 위한 관련부서 협의, 도시건축공동위원회 심의 등 관련 절차 이행을 위한 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하고자 함.

마. 귀책소재 : 서울특별시

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	이현철		도심정책팀장	김용민		역사도심재생과장	10/26 양병현
협조자	★계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-14135	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 역사도심재생과	/
전화	2133-8511	/전송	2133-0742	/	hyen1234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)