문서번호	교통운영과-20497
결재일자	2017.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호시설팀장	교통운영과장
이귀섭		구봉서	10/26 강진동
협 조

	마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역 설 계 변 경 검 토 보 고

2017. 10.

교통운영과

(신호시설팀)

마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역

설 계 변 경  검 토  보 고

마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 설계변경에 따라 감리

용역의 설계변경 사항을 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 마포, 양화대교 보행신호등 설치공사 감리용역

❍ 용역기간 : 2017.03.1.~2017.10.31.

❍ 계약금액 : 금21,054,000원

❍ 계약업체 : ㈜건영이앤씨 대표 박지명

□ 설계변경 검토

❍ 용역금액 변경

[단위 : 원]

구분	변 경 내 역			비고
	당초	변경	증·감
총용역비	21,054,960	14,920,000	감)6,134,960
공급가액	18,973,960	13,445,637	감)5,528,323
손해배상공제료	167,000	118,000	감)49,000
부가가치세	1,914,000	1,356,363	감)557,637

❍ 설계변경 사유

- 공사계약금액 증감률 ±10% 이상에 해당되는 물량증감(13.9%)이 발생하여 감리용역 대가 조정

❍ 공사물량 변경 내역

[단위 : 원]

세부사업명	공사내역	공사금액			비고
		당초	변경	증감
합 계		339,874,938	292,507,975	감)47,366,963
마포,양화대교 북단 보행신호등 설치공사 (서부도로사업소)	횡단보도 12개소 보행신호등 설치	276,515,710	239,422,728	감)37,092,982
양화대교 남단 보행신호등 설치공사 (강서도로사업소)	횡단보도 2개소 보행신호등 설치	63,359,228	53,085,247	감)10,273,981

□ 조치의견

❍ 상기 보고내용과 같이 마포, 양화대교 보행등 설치공사 감리용역에 대하여 설계변경를 시행코자 함

- 예산과목 : 자전거이용활성화 및 교통환경개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 도심내 자전거도로망 확충, 시설비 및 부대비, 감리비(401-02)

□ 향후 추진일정

❍ 재무과로 설계변경 계약 의뢰

❍ 변경계약 후 용역 준공

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.