문서번호	방재시설부-18270
결재일자	2017.10.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
윤석채		김인숙	10/27 남궁용
협 조
	주무관			김자환

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』

설계변경(총차3회,1차3회 정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

도시기반시설본부

방재시설부

『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』

설계변경(총차3회,1차3회 정산) 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

우리부에서 시행 중인『경춘선 폐선부지 공원조성공사(3단계)』설계변경(총차3회,1차3회 정산) 검토보고임.

[▸관련공문 : 선진경춘감-17-503호(2017.10.26.)]

Ⅰ		공사개요

○ 위    치 : 노원구 경춘선 폐선부지 [화랑대역(폐역) ~ 서울시계]

○ 규    모 : 공원조성 67,538㎡ (L=2.5㎞)

○ 기    간 : 2017. 01. 02. ~ 2018. 06. 30.

○ 시 공 사 : 유호산업개발(주) 대표 유정환

○ 계약현황                                           (단위:천원)

구 분	도 급 비	공 사 기 간	비 고
총 차	3,808,750	2017. 01 .02. ~ 2018. 06. 30.
1 차	3,784,550	2017. 01. 02. ~ 2017. 10. 31.

Ⅱ		계약변경(정산) 검토내용

○ 공사비 증‧감액                                      (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 차	3,808,750	3,804,900	감 3,850	정산
1 차	3,784,550	3,780,700	감 3,850	정산
2 차	24,200	24,200	-	-

○ 변경(정산)내역 (직접공사비)

(단위:백만원)

구분	전 체(총차)			1차분(금회 정산)			2차분			비고
	당 초	변 경	증 ‧ 감	당 초	변 경	증 ‧ 감	당 초	변 경	증 ‧ 감
조경	1,948	1,949	증 1	1,932	1,933	증 1	16	16	-
토목	534	555	증 21	534	555	증 21	-	-	-
건축	214	214	-	214	214	-	-	-	-
설비	26	26	-	26	26	-	-	-	-

○ 분야별 주요 변경(정산)내용

(단위:천원)

구 분	주 요 내 용	증 ․ 감	비 고
계		감 3,850
조 경	- 추가 요구사항 반영(예비준공검사시) · 철길건널목 1.5m 설치 - 현장여건 등 반영 물량 정산	증 832
토 목	- 추가 요구사항 반영(예비준공검사시) · 목재보도교 안전난간 2개소 반영 - 현장여건 등 반영 물량 정산 · 게비온 44.5m 추가 등	증 20,599
기 타	- 제경비 등 정산 처리	감 25,281

Ⅲ		책임건설사업관리기술단 검토의견

○ 예비준공검사, 현장여건 및 제경비 정산을 반영한 사항으로 공사계약일반조건 제20조에 의거 설계변경 요청에 대하여 계약금액을 조정함이 적정하다고 판단됨.

Ⅳ		보고자 의견

○ 현장여건에 따른 1차분 준공물량 및 제경비 등 정산 설계변경 사항으로 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어,

○ 설계변경(총차3회,1차3회 정산)시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 감리사 검토의견 공문 및 변경(정산)설계서 각1부.

2. 계약금액조정 검증대장 1부.  끝.