투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	제1회 설계변경 시행【2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역】

1. 우리사업소에서 시행중인 2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역에 대한 설계변경(1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2017년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 폐아스콘                             운반 및 처리용역

나. 용역기간 : ‘17.06.05 ~ ‘17.12.15

다. 공사개요 : 폐아스콘 운반 및 처리 15,400톤

라. 도 급 자

- 운반업체 : ㈜삼양이앤디 대표 최훈성

- 처리업체 : ㈜드림아스콘 대표 박광동, 서정윤

마. 변경사유 : 처리업체 변경(추가) 및 포장노선 추가에 따른 폐기물                             물량 증가

바. 변경내역

- 용 역 비                                 (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비고
도급비	공급가액	129,060,000	207,300,000	증)78,240,000
	부가세	12,906,000	20,730,000	증) 7,824,000
	계	141,966,000	228,030,000	증)86,064,000

- 운반 및 처리업체

구 분	당 초	변 경	비 고
운반업체	㈜삼양이앤디	변경없음
처리업체	㈜드림아스콘	㈜드림아스콘 ㈜검단아스콘

사. 예산과목  :  도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임  1. 노후포장도로정비공사(강서2구역) 폐아스콘 운반 및 처리용역 설계변경

검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김동민		도로보수과장	代정회곤		강서도로사업소장	10/27 김용제
협조자	관리단속과장	이희천
시행	도로보수과-11341	(		)	접수		(		)
우	07520	강서구 양천로 237	/
전화	02-2657-7951	/전송	02-2657-7960	/	arikdm@seoul.go.kr	/	대시민공개