문서번호	공원운영과-16861
결재일자	2017.10.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공원운영팀장	공원운영과장
서준기	代권지현	10/27 서동선
협 조

『2017년 천호공원 』

질서유지관리용역 1개월 연장 설계변경 검토

2017. 10

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『2017년 천호공원』

질서유지관리용역 1개월 연장 설계변경 검토

천호공원 공원이용객 증가 및 기습적인 불법 행위(노점상, 노숙인 등) 예방 및 단속을 위하여 질서유지관리용역 인원을 1개월간 연장 증원배치하여 공원운영에 만전을 기하고자 함.

용역 개요

Ⅰ

○ 용 역 명 : 2017년 천호공원 및 시민의 숲 질서유지관리용역

○ 용역기간 : 2017. 4. 01 ~ 10. 31(214일)

○ 계약금액 : 169,506,880원

- 천호공원 : 84,753,440원

- 시민의숲 : 84,753,440원

○ 도급자 : ***************

설계변경 내역

Ⅱ

○ 변경사유 :

- 공원내 노숙자 상존으로 인한 폭행, 싸움, 음주소란 등 대처를 위한 질서유지요원 계약기간 연장 및 근무시간 변경 필요

- 농구장, 배드민턴장 등에서의 분실 및 도난 사건 발생 예방

- 애완견 목줄 미착용, 배변 미처리, 흡연 등 기초질서위반행위 단속 필요

- 공원내 전동휠, 인라인, 자전거 진입에 따른 사고 위험으로 통제 필요

○ 총원 변경 내역 : 증원 120명

- 당     초 : 824 명 : 주간 18, 야간 464,  심야 342

- 변     경 : 944 명 : 주간 18, 야간 524,  심야 402

○ 인력증원 현황

- 기간 : 2017. 11. 01 ~ 11. 30. 1개월간 연장 (120명 증원배치)

- 1개월 연장에 따른 증원인력

야간, 0명 ⇛ 60명,  심야 0명 ⇛ 60명

○ 기간 및 추가인력 세부 증원현황
․ 인력증원 : 야간,  심야, 각 2명씩 30일간 120명 증원

운영 시간	당초	변경	증감
야간(15:00~23:00)	464	524	+ 60
심야(23:00~07:00)	342	402	+ 60

○ 용역비 변경 내역  : 9,799,870원(증액)

구분		용역비(원)			비고
		당초	변경	증감
총용역비		90,230,370	100,030,240	9,799,870
도급비	공급가액	82,027,610	90,936,580	8,908,970
	부가가치세	8,202,760	9,093,660	890,900
	계	90,230,370	100,030,240	9,799,870

○ 용역비 산출근거 : 2017년 계약 낙찰률 87.747%를 적용하여 인원증가분 임금 산정

조치계획

Ⅲ

○ 설계변경 내용은 계약부서 및 용역업체에 변경계약토록 조치하고자 함

○ 증액 용역비(9,799,870원)는 동부공원녹지사업소산하공원 유지관리,

공공운영비(기존 낙찰차액 활용) 예산지출

붙임)

1. 2017년 천호공원 질서유지용역  87.747% 낙찰가적용 산출내역 1부.(기존)

2. 2017년 천호공원 질서유지용역  87.747% 낙찰가적용 인원증가분 적용 산출내역 1부. (수정분).

3. 천호공원 질서유지용역 연장신청 요구자료 1부.  끝.