아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약(과업내용 변경 및 과업기간 연장) 의뢰

1. 동북권사업단-10572호(‘17.10.27.)와 관련입니다.

2. 「동북권체육공원 주변 보행환경개선 사업 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 변경 계약을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 동북권체육공원 주변 보행환경개선 사업 기본 및 실시설계 용역

나. 용역기간 : 2017. 7. 4. ~ 2017. 10. 31.

다. 계 약 자 : ㈜동일기술공사 외 1개사

라. 계약금액 : 금99,000,000원(금구천구백만원)

2. 변경내용

가. 과업내용 변경 : 붙임문서 참고

나. 과업기간 연장 : (당초) ‘17. 10. 31. → (변경) ‘17. 11. 30.

다. 계약금액 : 변경없음

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임   1. 과업내용 및 기간 변경 보고서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	동북권사업단장
★주무관	이시연		서울아레나팀장	이유국		동북권사업반장	10/27 한병준
협조자
시행	동북권사업단-10575	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 5층	/
전화	02-2133-8441	/전송	02-2133-0740	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)