문서번호	도로보수과-11457
결재일자	2017.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	10/30 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제7차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제7차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 884,334,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제7차, 추가분)

○ 작업위치 : 영등포구 여의도동 5-3주변 외 39개소

○ 작업기간 : 2017. 09. 19. ~ 2017. 10. 31.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	89,690천원	80,820천원	감) 8,870천원
관 급 비	19,097천원	17,750천원	감) 1,347천원
총 공사비	108,787천원	98,570천원	감) 10,217천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	영등포구 여의도동 5-3 주변	770	738	감) 32	현장실측 물량차이
2	양천로 주변 (신방화사거리~복지마곡충전소)	1,813	1,512	감) 301

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
3	영등포구 양퐁동1가 27-1 (신동아 아파트 진입로)	174	129	감) 45	현장실측 물량차이
4	양천구 목동 406-421 주변	495	469	감) 26
5	영등포구 문래로 180 (센트럴푸르지오 주변)	65	39	감) 26
6	영등포구 영등포동4가 442-3 (타임스퀘어 주변)	25	17	감) 8
7	영등포구 영신로 17 (영등포고가 입구교차로)	20	10	감) 10
8	영등포구 문래로 180 외 영등포고가차도	504	252	감) 252	차로 밑그림 제외
9	강서구 외발산동 276-9 (고강지하차도~외발산교차로주변)	3,814	4,128	증) 314	누락된 중앙선 및 문자·기호 표시 작업
10	강서구 공항대로 55길 2 (백석초등학교 주변)-등촌동	200	48	감) 152	차로 밑그림 및 도색 제외 (차선도색 상태양호)
11	강서구공항대로298 (블리스웨딩컨벤션주변)-발산역	200	51	감) 149
12	강서구마곡동727-1108 (마곡역주변)	200	42	감) 158
13	양천구 신월로 150앞 강월초교 입구 교차로	94	94	-
14	구로구경인로558-6 (구로역지하차도진입부)	54	20	감) 34	현장실측 물량차이
15	구로구 경인로 610 신도림 주민센터 입구 교차로	80	33	감) 47
16	강서구 공항입구 교차로외 6개소 주행유도선설치	11,891	5,191	감) 6,700	보고내용 참조
17	여의도 63빌딩 삼거리 주변	79	46	감) 33	현장실측 물량차이
18	영등포구 영등포동 602-162 주변	390	444	증) 54
19	경인로 248-13 105동 106동 앞	227	499	증) 272	주변 노면 퇴색구간 추가 시행
20	양천구 신정동 320-2	11,877	11,553	감) 324	현장실측 물량차이
21	강서구 개화동 427-2 부근	13	13	-
22	구로구 도림동 59 (두산아파트 앞)	70	28	감) 42	현장실측 물량차이
23	영등포구 양평로 92 외 (양평교~당산중학교앞)	480	240	감) 240	차로 밑그림 제외
24	영등포구 선유로 156 외 (경인고속입구~당중초)	192	96	감) 96

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
25	영등포구 선유로 33 외 (서울남부고용노동청~선유로1)	432	216	감) 216	차로 밑그림 제외
26	양천구 신정배수펌프장R (신목로126앞)	261	131	감) 130
27	양천구 청소년수련관 교차로 (목동서로143앞)	2,521	2,539	증) 18	현장실측 물량차이
28	강서구 공항대로395 (강서구청사거리)	72	54	감) 18
29	강서구 염창동 112-31 (경인양행부근)	84	42	감) 42
30	강서구 강서로 537	64	32	감) 32
31	강서구 가양동 1457-6(양천향교역 주변)	36	18	감) 18
32	강서구 화곡로 344 (강서구청사거리 주변)	100	68	감) 32
33	강서구 양천로 329 (양천향교역 주변)	158	79	감) 79
34	영등포구 버드나루로 104 (하정빌딩앞)	79	46	감) 33
35	영등포구 선유로 3 (신정교 하부교차로)	68	46	감) 22
36	구로구 거리공원입구 교차로	78	46	감) 32
37	구로구 고척동 경서로 (고척초교 앞 삼거리)	24	24	-
38	강서구화곡동산86-18 (강서힐스테이트121동앞)	384	250	감) 134	현장실측 물량차이
39	강서구 등촌동 700 (등촌성당)	96	96	-
40	양천구 신정교 서단 교차로	253	171	감) 82	현장실측 물량차이

○ 보고내용

- 제7차 작업지시 40개소에 대해 작업완료하였음.

- 연번 16번 강서구 공항입구 교차로외 6개소 주행유도선(컬러레인) 설치구간 중 ‘목동오거리’는 도로교통 소통개선 사업과 연계되어 있어, 관할 자치구 토목사업 완료 후 노면작업시 병행하여 시행하고자 함.

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 중 일부 물량 변경이 불가피하여 현장여건에 적합하게 완료하였으며, 작업완료량에 대해서는 추후 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제7차 작업완료 내역서 1부.

2. 제7차 작업완료 사진대지 1부(별도첨부).

3. 제7차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.