아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	「서울특별시 새마을회관 개보수 지원」사업계획변경 승인 및 기간연장 재협약

1. 서울특별시새마을회 행정지원 282-356(2017.10.27.)호와 관련입니다.

2.「서울특별시 새마을회관 개보수 지원 협약서」제7조(사업계획서)에 의거 다음과 같이 사업계획(예산 세부산출내역) 변경을 승인하고, 이에 따른 협약기간 연장을 추진하고자 합니다.

가. 단 체 명 : 서울특별시새마을회

나. 사 업 명 : 서울특별시새마을회 사무실 개·보수 지원

다. 지원금액 : 300,000천원

라. 변경사유 : 새마을회관 개보수 확대로 자부담비 증가 및 사업계획 일부 조정

마. 승인요청 내용

1) 총사업비 변경 : 승인

- 당초 : 300,000천원 (보조금 300,000천원)

- 변경 : 326,490천원 (보조금 300,000천원, 자부담 26,490천원)

2) 사업계획(예산 세부산출내역_붙임참조) 변경 : 승인

3) 협약기간 연장 : 기간변경 재협약

- 당초 : 2017. 5. 1. ~ 2017. 11. 30.

- 변경 : 2017. 5. 1. ~ 2017. 12. 30.

바. 행정사항 : 협약 기간연장에 따른 변경(수정)협약 체결

붙임 : 1. 새마을회 사업조정 및 기간연장 신청공문 1부.

2. 보조금 변경예산서 1부.

2. 변경협약서 1부.  끝.

주무관	김현정		주민지원팀장	정순은		자치행정과장	10/30 유보화
협조자
시행	자치행정과-23060	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청	/
전화	(02)2133-5824	/전송	(02)731-0756	/		/	부분공개(5)