아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	한남대교 보수공사 준공기한 연기요청

1. 교량안전과-19492호(2017.10.30)와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중에 있는『한남대교 보수공사』에 대하여 아래와 같이 준공      기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 한남대교 보수공사

나. 공사기간 : 2017.05.11. ~ 2017.11.06

다. 도 급 자 : 유등건설㈜ (대표:이혜경)

라. 준공기한 변경 요청내용

1) 당초 : 2017.05.11. ~ 2017.11.06

2) 변경 : 2017.05.11. ~ 2017.12.20

마. 귀책사유 : 발주처

바. 연기사유

1) 철근배근을 위한 천공공법 변경 검토 및 기초 지지력 확보를 위한 확대  단면 축소 방안 검토 등으로 인한 공사추진 지연 발생.

사. 예산과목

1) 교량안전과, 교량관리, 한강교량관리, 한남대교보수공사, 시설비및부대비,  시설비

붙임 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	교량안전과장
★주무관	김태형		강구조교량팀장	정회평		교량안전과장	10/30 한유석
협조자	계약1팀장	조현
시행	교량안전과-19509	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 1동 2층	/
전화	02-2133-1964	/전송	02-2133-1429	/		/	부분공개(5)