문서번호	설비부-18152
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
성호준		유병기	10/30 代유병기
협조

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10.

도시기반시설본부

(설비부)

『만리재로 보행환경개선 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

『만리재로 보행환경개선 전기공사』에 소요되는 관급자재 설치시기가 미도래하여 납품기간 연기에 대해 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 만리재로 보행환경개선 전기공사

□ 위    치 : 서울역 고가 접속부 ~ 마포구 공덕오거리

□ 규    모

○ 가 로 등 : 가로등 개량(LED 100W, 9m) 159본, 가로등 분전반 7면 등

○ 교통신호 : 교통신호기 5개소 등

□ 계약금액 : 861백만원(2차 : 767백만원)

□ 공사기간 : `16.12.15. ~ `17.11.26.

○ 2차 : `17.06.01. ~ `17.11.26.

Ⅱ		보고내용

□ 계약 현황

계약번호	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
00155018803	㈜현암	46,813,000	`17.10.30.
22163115801	셀 라이텍코리아(주)	99,840,000	`17.10.30.
00168106301	한국전기	153,900,000	`17.10.30.
12162069204	에이컴에너지(주)	69,930,000	`17.10.30.
00168063404	에이컴에너지(주)	27,750,000	`17.10.30.

□ 납품기한 연기

○ 연기사유 : 납품시기 미도래

○ 연기기한

계약번호	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
			당 초	변 경
00155018803	㈜현암	46,813,000	`17.10.30.	`17.11.30.
22163115801	셀 라이텍코리아(주)	99,840,000	`17.10.30.	`17.11.30.
00168106301	한국전기	153,900,000	`17.10.30.	`17.11.30.
12162069204	에이컴에너지(주)	69,930,000	`17.10.30.	`17.11.30.
00168063404	에이컴에너지(주)	27,750,000	`17.10.30.	`17.11.30.

○ 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 예산과목

도로시설물관리, 도로 및 부속물관리, 노후도로조명개선, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		조치계획

○ 현장여건에 맞게 관급자재가 적기에 납품될 수 있도록 납품기한을 연기하고자 함

붙임 : 관련문서 및 합의서 각 5부.  끝.