투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	종로 중앙버스 전용차로 개통시기 조정 요청

1. 교통운영과-16753(2017.8.31.)호 및 설비부-15404(2017.9.8.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 요청한 『종로 BRT 및 도로공간 재편 전기공사』 관련하여 `17.9.8자로 설계도서 보완을 요청하였으나 현재까지 설계가 완료되지 않아 금년 연말까지 공사준공이 불가하오니 버스중앙차로 개통시기 조정 등 필요한 조치를 하여주시기 바랍니다.

설계보완 요청사항 및 문제점 -

설계보완 요청사항	문제점	비고
· 신호등 선로공사 설계누락 (터파기, 되메우기 포장) · 이전비 산출근거 누락 및 시행주체 불분명 · 지하매설물에 따른 신호등선로 매설 불가 · 폐기물 처리용역 설계 누락 · 관급자재(신호등) 계약심사 누락 등	· 설계 미 완료로 보도굴착 심의진행 불가 · 동절기 굴착통제기간전 굴착공사 완료 불가 · 신호등 구매 입찰 및 제작기간 부족 · 계약금액의 100%이상 증액이 예상됨에 따른 사업 주관부서 의견 필요

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	진종구		녹색성장과장	오삼록		설비부장	10/30 代유병기
협조자
시행	설비부-18151	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개