문서번호	교량안전과-19492
결재일자	2017.10.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김태형		정회평	10/30 한유석
협조

『한남대교 보수공사』 준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10

안전총괄본부

(교량안전과)

『한남대교 보수공사』 준공기한 연기 검토 보고

우리과에서 시행중인『한남대교 보수공사』와 관련하여 감리사로부터 준공기한 연기 검토 의견서가 제출되어 이에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 한남대교 보수공사

□ 공사내용 : 한남대교 교각(P7)보강, 전망대 단면보수 308㎡

□ 공사기간 : 2017.05.11. ~ 2017.11.06

□ 시 공 사 : 유등건설(주) (대표:이혜경)

□ 감 리 사 : ㈜ 동성엔지니어링

□ 총사업비 : 427,721천원(도급비:386,071, 관급비:41,650)

Ⅱ		그 간 추진사항

□ 2017.5.11   : 공사착공

□ 2017.09.09 ~ : 교각보수(P7)공사중

□ 2017.09.23.: 전망대보수공사 완료(4개소)

□ 2017.10.20. : 설계변경 자문회의

□ 2017.10.25. : 설계검토 요청( 교량안전과→동해종합기술공사)

□ 2017.10.27. : 설계검토 제출(동해종합기술공사→교량안전과)

Ⅲ		준공기한 연기 검토

□ 연기 내용

당 초	변 경
’17.05.11.∼’17.011.06	’17.05.11.∼’17.12.20

□ 연기 사유

- 철근배근을 위한 천공공법 변경 검토 및 기초 지지력 확보를 위한 확대단면 축소 방안 검토 등으로 인한 공사추진 지연 발생

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		행 정 사 항

□ 감리단에서 제출된 준공기한 연기 보고내용을 검토한 바 타당한 것으로 사료되어 보고내용과 같이 승인코자 함.

□ 재무과 통보하여 준공기한 연기 처리.

따로붙임 : 관련공문 1부. 끝.