문서번호	토목부-20594
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도시고속도로과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
남덕희	명경출	김영수	류훈		09/29 고인석
협 조	건설총괄부장			이상국
	주무관			박운용

노들섬 특화공간 조성 토목공사 발주계획 보고

2017. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

노들섬 특화공간 조성 토목공사 발주계획 보고

노들섬 특화공간 조성공사 중 지장물철거, 옹벽보수·보강 및 설치, 상하수도시설, 보행육교 설치 등 토목공사 발주계획 검토 보고임

※ 근거 : 노들섬 문화명소화 조성사업 추진계획(공공개발센터-1160,`15. 2. 9.)

노들섬 특화공간 조성공사 발주 시행계획(건축부-15878,`17. 9.12.)

Ⅰ		공 사 개 요

○ 위    치 : 서울시 용산구 이촌동 302-6일대 (노들섬)

○ 목   적 : 노들섬에 시민 모두가 즐길 수 있는 새로운 문화명소(공연장, 업무·                   상업시설, 동서측 연결로 등)를 조성하기 위한 토목공사 시행

○ 규    모 : 옹벽보수공사 10,137㎡, 보도육교설치 B=3.5m, L=139m,

우수관 979m, 오수관 467m

○ 기    간 : 2017. 10. ~ 2018. 12.

○ 총공사비 : 6,311백만원

(공사비 5,507백만원, 폐기물 293백만원, 관급자재비 495백만원, 이전비 16백만원)

구분	공종	세부 내역
상단부	토공사	절토: 6,066㎥, 성토: 2,488㎥, 터파기: 38,709㎥
	우수공사	D450mm: 546m, D600mm: 335m, D800mm: 98m
	오수공사	D300mm: 467m
	급수공사	D75mm: 43m, D25mm: 62m
	포장공사	아스콘T500mm: 1,010㎡, 콘크리트T500mm: 560㎡
	가시설공사	L=68.4m
	보행육교	B=3.5m, L=139m
하단부	포장공사	콘크리트T500mm: 6,800㎡
	옹벽보수공사	보수면적: 10,137㎡
	철골계단	2개소

Ⅱ		연차별 투자계획

□ 예산현황 (전액 시비)

(단위 : 백만원)

구 분		계	'16년 이전	'17년	'18년
본부(재배정)예산 ⓐ
	공 사 비	6,311	-	1,500	4,811

※ 예산과목 : 도시재생본부 공공재생과, 공공재생계획수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 노들섬 문화명소화 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비

Ⅲ		추진경위

○ `15. 2. 9 : 노들섬 문화명소화 추진계획(공공개발센터)

○ `16. 8. 23 : 설계용역 계약 및 착수

○ `17. 3. 1 : 기본설계 완료

○ `17. 7.31 : 실시설계 완료

○ `17. 9.18 : 계약심사 완료

○ `17. 9.21 : 주계약자 공동도급 공종분리 검증위원회 개최

○ `17. 9.22 : 일상감사 의뢰

○ `17. 9.25 : 일상감사 완료

Ⅳ		공사 및 용역 발주방법 검토

□ 공사입찰 및 계약방법 검토 (추정가격 : 5,007백만원)

○ 발주방법

- 주계약자 공동도급 방식/제한경쟁입찰(지역제한)

- 장기계속공사

○ 낙찰자 결정방법

- 적격심사 적용(지방계약법 제13조)

○ 기타사항 : 붙임 참조

□ 시설공사 발주계획

○ 발주시기 : '17. 9월

○ 발주방법 : 자체 발주

○ 입찰참가자격 사전검토 결과(공종분리 검증위원회)

- 공사의 공종별 비율은 강구조물공사(28.84%), 포장공사(8.59%), 시설물유지관리공사(16.41%), 토공사 등(46.16%)으로 구성되어 있음.

- 옹벽보수공사를 부계약자(시설물유지관리업)에게 도급을 주는 방안도 있으나,

옹벽보수는 신기술 및 특허제품이 설계에 적용되어 부계약자인 전문건설업체(시설물유지관리업)의 직접시공 비율이 너무 낮아 주계약자 시공범위에 포함하여 시행함이 바람직함.

※ 공동수급체 시공비율

- 주계약자[토목공사업(토목건축공사업 허용)] : 62.57%

부계약자[강구조물공사업] : 28.84%

부계약자[포장공사업] : 8.59%

○ 입찰참가자격

-「건설산업기본법」에 의한 종합공사의 업종 토목공사업 또는 토목건축공사업 등록을 필한 업체와 전문공사의 업종 강구조물공사업, 포장공사업 등록을 필한 업체가 반드시 주계약자 공동도급방식에 의한 공동수급체를 구성하여 입찰에 참여하여야 함.

- 지역제한경쟁입찰 적용(지방계약법 시행규칙 제24조)

※ 입찰업체(부계약자 포함)는 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자 계약체결일)까지 주된 영업소가 서울특별시에 소재하는 업체이어야 함.

□ 건설폐기물처리용역 발주계획 (추정가격 : 266백만원)

○ 발주시기 : '17.10월

○ 발주방법 : 공사와 분리 발주

- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조

○ 입찰참가자격

- 폐기물 관리법 제25조 및 건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 제21조의 규정에 의한 폐기물수집 ․ 운반업과 폐기물 중간처리업 허가를 모두 득한 업체

- 단, 자격보완을 위하여 건설폐기물수집․운반업 등록업체는 폐기물 중간처리업체와 공동도급(분담이행방식)이 가능하며, 이 경우 대표자는 건설폐기물수집 ․ 운반업체이어야 함.

- 공동도급(분담이행방식)인 경우, 공동수급체 구성원수는 대표사를 포함하여 2개사 이내로 구성

- 대표자는 입찰 공고일 현재 서울특별시 및 경기도에 주된 영업소를 둔 업체

Ⅴ		향후 추진계획

○ `17. 10. : 공사계약 및 공사착공

※ 건설사업관리용역은 건축, 토목, 전기, 소방 등 통합발주 시행(건축부)

○ `18. 12. : 공사준공

붙임 : 1. 공사설명서 1부.

2. 공사입찰 및 계약방법 검토 1부.