문서번호	한강관광사업과-2251
결재일자	2017.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		한강관광사업과장	총무부장
박정민		손창열	10/30 박기용
협조

「한강함상공원 조성공사 감리(선박분야)용역」

준공기한 연기 보고

2017. 10.

「한강함상공원 조성공사 감리(선박분야)용역」

준공기한 연기 보고

「한강함상공원 조성공사 감리(선박분야)용역」 추진 중 선박 공정의 추가 작업 진행으로 용역의 준공기한을 연장하여 공사 진행에 만전을 기하고자 함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 한강함상공원 조성공사 감리(선박분야)용역

❍ 용역기간 :‘17. 06. 07. 〜‘17. 10. 31.

❍ 용역업체 : ㈜한국선급엔지니어링

❍ 용 역 비 : 15,485,000원

❍ 용역내용 : 함정 수리·도장·예인 등 선박 관련 전반에 관한 사항

□ 보고내용

❍ 준공기한 변경

- 당초 : 2017. 06. 07. ~ 2017. 10. 31.

- 변경 : 2017. 06. 07. ~ 2017. 11. 30.

❍ 연기사유

- 선박 공정의 추가 작업 진행으로 인한 완료 시기 지연

□ 조치계획

❍ 상기와 같이 용역기간을 연장하여 공사 진행에 만전을 기하고자 함.