문서번호	생산관리과-14140
결재일자	2017.10.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		생산관리과장	생산부장
이규현		한희선	10/31 유성종
협조
	기전설비과장		조성태

- 암사정수센터 배출수처리시설 및 증설 -

설계의 경제성 등 검토(VE) 결과 보고

2017. 10.

상수도사업본부

(생산부)

- 암사정수센터 배출수처리시설 및 증설 -

설계의 경제성등 검토(VE) 결과 보고

암사정수센터 배출수처리시설 증설 개량 기본 및 실시설계에 따른 설계의 경제성 등 검토(VE) 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진 근거

□ 건설기술진흥법 시행령 제75조

□ 설계의 경제성 등 검토 운영개선계획(행정1부시장방침 제15호, ’17.1.22)

□ 심사대상

○ 본청, 사업소 투자․출연기관(시비 재배정, 국․시비보조사업)

○ 공사비 50억 이상~100억 미만 공사, 100억 이상 단순공사

Ⅱ		사업개요

□ 사  업  명 : 암사정수센터 배출수처리시설 증설 및 개량

○ 사업내용 : 배출수지 및 배슬러지 증설을 통한 안전한 배출수 관리

○ 위    치 : 암사동 산1번지 암사정수센터 內

○ 규    모 : 배출수처리증설 1지, 배슬러지 증설 3지

□ 설계금액 : 7,000백만원

Ⅲ		경제성 심사 결과

□ 주관부서 : 본청 재무국 계약심사과

□ 심사일시 : ’17.10.12(목) ~ 10.23(목)

□ 심사일정(현장답사 및 검토회의)

일 시	내 용
’17.10.12(목) 14:00~18:00	- 사업설명 및 현장답사 ‣ 장소 : 암사정수센터 회의실, 현장방문
’17.10.16(월) 10:00~18:00	- 1차 검토회의 : 아이디어 제시, 대안 구체화 ‣ 장소 : 암사정수센터 회의실
’17.10.17(화) 10:00~18:00	- 2차 검토회의 : 대안에 대한 가치평가 및 분석 ‣ 장소 : 암사정수센터 회의실
’17.10.23(월) 14:00~18:00	- 최종 검토회의 : 보완 및 의사결정 ‣ 장소 : 계약심사과 내 회의실

□ 외부 자문위원

○ 총괄업무 : 아이엠이엔에이㈜

- 김성훈, 장경태, 구소연위원

○ 상하수도 : 김수환 ㈜경화엔지니어링 상무

○ 상하수도 : 우택명 ㈜대한컨설턴트

○ 전기분야 : 박병수 ㈜은세기술 대표

○ 토질분야 : 공병철 ㈜동성엔지어링 전무

□ 검토 결과

○ 설계VE 심사결과

구 분	제 안	채 택	미 채택	비 고
건 수	70	53	7	설계보완 10건

○주요검토 내용

- 유량계실 구조물의 깊이를 축소하여 적용

- 수중터파기를 일반 또는 용수터파기등으로 검토

- 엄지말뚝 설치간격을 1.6~1.8m에서 2.0m로 검토반영

- 1정수장 배출수지 옹벽형식을 L형옹벽에서 보강토 옹벽으로 변경

Ⅳ		행정사항

□  외부 전문가 자문수당 : 9,592천원

○ ‘17년 하반기 설계의 경제성 등 검토(VE) 자문비는 발주부서에서

자체 예산으로 지급  (계약심사과-19229(2017.10.25.)

— 위원(기술사 4명)   : 5,149천원(1,287천원 × 4명)

— 위원(진행위원 3명) : 4,443천원

— 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치 및 부대비(시설비)

Ⅴ		향후계획

○ 기본 및 설계용역 준공   : ‘17.12월

○ 공사 계약심사           : ‘18. 1월

○ 공사 및 용역 발주       : ‘18. 2월

○ 공사착공                : ‘18. 3월

붙임 : 1. 암사정수장배출수처리 및 증설 설계경제성 심사계획 1부.

2. 설계경제성 심사 자문수당 지급현황 1부.  끝.